공고 - 제2016-18호

과업지시서

- 하수도분야 공동연구 로드맵 작성 -

2016. 4.

Ⅰ. 과업 개요

❏ 과 업 명 : 하수도분야 공동연구 로드맵 작성 연구

❏ 추진배경 및 목적

❍ 하수도 분야 R&D 대부분이 상용화 기술개발에 치중되어 하수도 관련 정책조사·연구가 부족, 개별 지자체별로 수행한 연구에 대한 종합적인 정보 공유가 부족하여 중복된 연구과제 등이 수행 중

❍ 따라서, 기 수행된 국내 하수도 연구과제와 향후 국내 정책방향 및  하수도 기술에 대한 조사를 통해 앞으로 하수도 공동연구를 통해 도출해야 하는 연구과제 Pool을 구성하고자 함

❏ 계약방법 : 입찰(제한경쟁입찰)에 의한 선정 (컨소시엄 가능)

❏ 사업기간 : 계약일로부터 4개월

❏ 추정금액 : 금 삼천만원정 (￦ 30,000,000, VAT 포함)

❏ 사업의 목표

❍ 하수도 공동연구 필요성 및 효과적인 협의회 운영을 위한 로드맵 작성

❍ 하수도 공동연구 협의회에서 미래 하수도 발전을 위해 수행해야 하는 하수도 전반에 걸친 단기·중기·장기 연구과제 발굴

❍ 하수도 공동연구 결과의 활용방안 수립

- 하수도 분야 연구결과의 현장적용 방안

- 정책 수립 및 관련법 개정시 활용 방안 마련

Ⅱ. 과업 내용

국내·외 하수도분야 연구현황 조사

❍ 국내 수행중인 하수도분야 연구사례 및 현황 조사

- 중앙부처, 지자체, 공공기관 등 연구 수행 현황 조사

❍ 국외 수행중인 하수도분야 연구사례 및 현황 조사

- 미국, 일본, 유럽등 하수도 선진국의 연구 수행 현황 조사

- 일본하수도협회(JSWA), 미국 물환경연맹(WEF), 국제물협회(IWA)의 연구 내용 및 매뉴얼 작성 현황 분석

- 일본하수도협회 분야별 주요 메뉴얼 구매 및 내용 분석

공동연구 필요성 및 협의회 운영 로드맵 작성

❍ 국내·외 연구현황조사를 통해 공동연구 필요성 도출

❍ 향후 협의회 운영·기금조성 방안 제시

하수도분야 연구 로드맵 작성을 통한 공동연구과제 Pool 도출

❍ 중장기적으로 향후 하수도발전 과정에 대한 문헌조사 및 발전방향 제시

- 환경부의「2차 국가하수도종합계획」,「미래비전 2050」을 바탕으로 향후 정책방향 및 기술개발 방향 예측

❍ 하수도 공동연구 로드맵 작성 및 공동연구과제 도출

- 연구분야에 대한 분류체계 마련

- 학회·지자체·환경부·연구기관 설문을 통해 연구과제안 조사

- 단·중‧장기 연구과제 도출(과제별 필요성, 과업내용, 용역비, 최종성과물 유형, 향후 활용방안을 작성)

- 연구과제 공모·심의·선정 및 추진체계 마련

공동연구성과 활용방안 마련

❍ 중앙부처 및 지자체, 협회, 공단 등 하수도 관련기관의 활용방안 제시

- 연구수행 결과에 대한 정책건의, 후속연구 과제 등

❍ 하수도 R&D 정보관리시스템 구축방안에 대한 제안

- 유사 연구기관과의 의사소통 및 협력 방안 마련

Ⅲ. 과업 수행 방법

가. 국내 자료수집 및 분석

○ 과업수행과 관련하여 제출한 국내·외 관련정책 및 제도, 기술 자료는 최신자료이어야 하며 출처와 근거를 명시하여야 한다.

나. 연구진 및 자문위원회 구성․운영

○ 과업의 체계적이고 충실한 수행을 위하여 본 과업과 관련 있는 연구경험이 풍부한 전문가들이 연구진에 참여토록 하여 종합적인 연구가 되도록 하여야 한다.

○ 과업기간 중 내실 있는 성과를 거둘 수 있도록 산․학․연 전문가 및 관계 공무원이 참여하는 자문위원회를 감독관과 협의하여 구성하여 자문을 받아야 하며, 필요한 경우 보고회의와 같이 개최할 수 있다. (외부자문위원 최소 5인 이상)

Ⅳ. 행정사항

가. 과업수행계획서 제출

○ 과업수행자는 계약일로부터 15일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 발주처(한국상하수도협회)의 승인을 얻어야 한다.

- 과업수행 방향 및 방법

- 과업수행 세부내용 및 수행계획(예정공정표 포함)

- 각 분야별 참여 전문인력 및 조직편성(책임자 이력서 포함)

- 보안서약서 및 기타 발주기관의 지시 및 승인 사항

- 기타 과업수행에 필요한 사항 등

○ 과업수행자는 용역수행 중 참여전문인력 등 중요사항 변경에 대하여는 변경 발생일 전 5일 이내에 발주처의 사전 승인을 받아야 하며, 기타 경미한 변경사항에 대해서는 실정에 맞게 계획을 변경하고 발주처에 통보하여야 한다.

○ 과업수행 방법 및 성과의 세부내용을 검토하기 위하여 감독관의 요구가 있을 때에는 필요한 자료를 제출하고 이를 설명하여야 하며, 감독관의 지시사항에 대하여는 성실히 수행하고 조치결과를 즉시 보고하여야 한다.

나. 보고회의 등의 개최

○ 과업수행자는 본 용역사업 수행기간 중 감독기관의 요청이 있을 때 수행상황을 보고하여야 하며, 과업기간 중 3회 이상의 보고회를 개최하여야 한다.

- 착수보고회 : 계약일로부터 15일 이내

- 중간보고회 : 계약일로부터 50일 이내

- 최종보고회 : 계약만료 20일 이전

○ 중간․최종보고회의에는 본 과제의 성과물을 활용하여 자문위원 및 감독기관을 대상으로 실시하고, 과업수행자는 중간․최종 보고회의때 제시된 의견을 반영하여 성과물을 개선하여야 한다.

다. 보고서 등의 작성․제출

○ 본 용역의 중간보고서는 중간보고회 7일 전에 감독기관에 제출하여야 한다.

○ 본 용역의 성과물은 최종보고회의 심의를 받은 내용을 최종 보완하고, 계약 만료 10일 전에 초안을 작성하여 감독관의 승인을 받아 인쇄하여 계약기간 내에 제출한다.

라. 과업의 변경 및 조정

○ 감독관은 필요한 경우 과업수행자가 제출한 과업추진 공정이나 과업수행내용을 예산의 범위 내에서 조정할 수 있다.

○ 과업수행자는 과업 수행계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 감독관의 변경요구가 있을 때에는 적극 반영하여야 한다.

○ 과업수행 중 참여 전문 인력의 변동 등 중요사항이 있을 경우에는 변경 발생일 전 5일 이내에 감독관의 승인을 받아야 한다.

마. 하자보증 및 책임관계

○ 사업수행자는 사업종료 후 사업비 중 경비 사용내역서를 제출하여야 하며, 감독관은 이에 대한 검토 후 정밀정산을 위한 자료를 요구할 수 있다.

○ 과업수행자는 용역이 완료된 후 각종 성과품의 미비사항 및 기본계획 확정과정에서 보완사항이 발생한 경우, 최종 성과품에 그 내용을 즉시 보완하여 제출하여야 한다.

Ⅴ. 보안 및 기타사항

○ 과업수행자는 용역진행 중 또는 완료 후 본 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설하여서는 아니 되며, 보안규정을 철저히 준수하고 과업수행계획서와 함께 보안각서를 제출하여야 한다.

○ 최종 납품된 과업의 성과물과 관련된 저작권은 한국상하수도협회와 하수도공동연구협의회 참여기관이 가진다.

○ 과업수행자는 성과물에 대하여 책임을 지며, 본 과업을 추진함에 있어 외부자료를 사용할 경우 저작권 저촉여부 등을 필히 검토하여야 하며, 문제발생시 이에 대한 책임을 져야 한다.

○ 자료의 분석과 검토가 완료된 후 용역보고서를 작성하되, 자료가 누락 또는 오기되었을 경우 필요한 추가 작업은 과업수행자가 부담·시행하여야 한다.

○ 본 과업수행 목적으로 사용한 각종 기준과 모든 공식자료 및 통계는 최근 자료를 이용하여야 하며, 서면으로 그 근거를 제시하여야 한다.

○ 과업수행자는 본 과업에 관련된 모든 보고서의 조사분석된 사항과 정리된 자료의 출처, 연도, 참고사항과 분석자료 등 이에 관련된 서류를 한국상하수도협회에 제시하여야 한다.

○ 과업수행 중 용역사업 발주자인 한국상하수도협회와 과업수행자간 이견이 있을 때에는 양자 상호 협의를 통하여 해결하되, 계약 쌍방간의 의견이 상이할 때는 한국상하수도협회의 해석을 우선한다.

○ 계약자는 본 과업지시서의 내용을 성실히 수행하여야 한다.

Ⅵ. 성과품 제출

○ 최종보고서 및 요약보고서 각 50부

※ 보고서 파일 및 관련 전산자료(CD 2부) 별도 제출

Ⅶ. 용역비 집행 및 정산기준

○ 용역비 집행기준

- 책임연구원 및 연구원(연구보조원 포함)에 대한 인건비 지급

- 유인물비, 여비, 회의비, 전산처리비, 재료비 등 직접경비 지급

○ 정산기준

- 과업완료 후 직접경비는 집행결과에 따라 감독관이 인정한 부분에 대하여 예산의 범위 내에서 정산 처리한다.