금강수계 환경기초조사사업 연구관리지침

제정 2013. 03. 29. 금강수계관리위원회 지침 제47호

전부개정 2014. 12. 29. 금강수계관리위원회 지침 제52호

일부개정 2017. 02. 16. 금강수계관리위원회 지침 제62호

일부개정 2019. 12. 31. 금강수계관리위원회 지침 제69호

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 지침은「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」제33조제14호 및 같은 법 시행령 제35조제5호에 따른 환경기초조사사업(이하 “환경기초조사사업”이라 한다)을 효율적으로 추진하고 사업관리에 필요한 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “환경기초조사사업”이란 유역 내 물환경 관리를 위한 기초정보의 수집·공유, 유역의 환경보전을 위한 조사·연구 및 관내 연구기관 등의 조사·연구 역량 강화를 목적으로 하는 사업을 말한다.

2. “연구과제”란 금강수계관리기금을 재원으로 조사·연구를 수행하고, 성과물을 제출하는 과제를 말한다.

3. 삭제

4. 삭제

5. “연차평가”란 사업예산이 2년 이상 편성된 연구과제를 대상으로 최종년도가 아닌 해에 당해년도 연구의 적정 추진여부 및 차년도 연구계획을 확인하고자 실시하는 평가를 말한다.

6. “최종평가”란 연구과제의 최종년도에 그간 수행한 연구결과 전반에 대한 적정 추진여부를 확인하고자 실시하는 평가를 말한다.

제2장 운영체계 및 역할

제3조(총괄부서) ① 총괄부서는 환경기초조사사업을 총괄하는 부서로서 금강수계관리위원회(이하 “수계위”라 한다) 사무국 유역계획과로 하며 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 환경기초조사사업 총괄 및 예산 검토·집행·정산에 관한 사항

2. 환경기초조사사업 기본계획(5개년) 수립에 관한 사항

3. 연도별 환경기초조사사업 추진계획 수립에 관한 사항

4. 삭제

5. 삭제

6. 삭제

7. 연구성과물 관리 및 성과 확산에 관한 사항

② 총괄부서는「유역관리 업무지침」제24조에 따라 매년 3월말까지 전년도 환경기초조사사업 추진 성과를 환경부장관에게 보고하고 국립환경과학원장에게 통보하여야 한다.

제4조(과제관리부서) ① 과제관리부서는 수계위 사무국 부서 중 연구내용과 관련 있는 부서를 총괄부서에서 지정하며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구과제 추진에 관한 사항

2. 연구계획서 검토·승인에 관한 사항

3. 평가위원회 및 행정위원회 구성·운영에 관한 사항

4. 연구성과물의 정책활용 등 성과활용 촉진에 관한 사항

5. 그 밖에 연구과제 수행에 필요한 사항

② 과제관리부서는 용역사업 완료 후 그 결과를 총괄부서에 보고하여야 한다.

제5조(연구기관) 연구기관은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」에 따라 수계위와 계약을 체결하고 환경기초조사사업을 수행하는 기관으로서 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 연구계획서 작성‧제출

2. 연구과제의 보고 및 평가 등을 위한 보고서 작성 및 발표

3. 연구과제 성과활용 촉진에 관한 사항

4. 종료된 연구과제의 사후관리 및 각종 보고에 관한 사항

5. 수계위 사무국에서 연구과제 추진을 위해 필요하다고 인정하는 사항

6. 그 밖에 연구과제의 수행에 필요한 사항의 관리

제6조(평가위원회) ① 평가위원회는 연구과제 및 연구기관의 선정, 연구결과의 평가 등을 위하여 구성되며, 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 연구과제 선정을 위한 과제심의회

2. 연구기관 선정을 위한 제안서평가회

3. 수행결과의 적정성 확인을 위한 최종평가회 및 연차평가회

4. 삭제

② 평가위원회는 위원장 1명을 포함한 10명 내외의 위원으로 구성하며, 위원은 다음 각 호와 같다.

1. 환경부와 그 소속기관 관련 부서장 또는 담당 2명 이상

2. 금강수계 광역자치단체와 기초자치단체 관련 업무담당 1명 이상

3. 수계위 사무국장이 위촉하는 민간전문가 3명 이상

③ 평가위원회의 위원장은 평가위원회를 대표하고 그 사무를 총괄하며, 위원 중에서 호선(互選)하되 민간위원을 우선으로 한다.

④ 평가위원회는 구성원 중 과반수의 출석으로 개회하고 정족수가 미달된 경우에는 평가회를 연기하여야 한다.

⑤ 평가위원회는 평가위원이 출석하여 직접 평가하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 경우 서면평가로 대체할 수 있다.

제7조(행정위원회) ① 행정위원회는 심의·평가 결과 및 연구기관의 이의신청 등을 심의하기 위해 구성되며, 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 제17조제2항에 따라 과제관리부서가 부적합으로 평가된 연구과제에 대한 제재조치를 할 경우 이에 대한 제재수위의 적정여부 심의

2. 제17조제3항에 따라 연구기관이 제재조치 결과에 이의신청을 한 경우 이에 대한 적정여부 심의

3. 과제관리부서에서 과제관리를 위해 필요하다고 인정하는 행정조치에 대한 적격 여부 심의

② 행정위원회는 위원장 1명을 포함한 10명 내외의 위원으로 구성하며, 위원은 다음 각 호와 같다.

1. 수계위 사무국 부서장 중 1명 이상

2. 자문변호사 등 법률전문가 중 1명 이상

3. 수계위 사무국장이 위촉하는 민간전문가 3명 이상

③ 행정위원회 위원장은 행정위원회를 대표하고, 그 사무를 총괄하며, 위원 중에서 호선(互選)하되 민간위원을 우선으로 한다.

④ 행정위원회 심의안건은 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다. 이때, 심의 또는 의결은 서면으로도 가능하다.

제3장 환경기초조사사업 시행

제8조(기본계획 수립) ① 총괄부서는「유역관리 업무지침」제24조에 따라 수계위 사무국에 제출된 5년 단위 기본계획안을 수계위에 보고한 후 시행한다.

② 제1항에 따라 시행하는 계획(이하 “기본계획”이라 한다)은 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 환경기초조사사업의 개요

2. 기존 기본계획의 추진현황

3. 금강수계 현황 분석을 통한 기본계획 수립방향 설정

4. 연구과제 도출

제9조(연도별 추진계획 수립) ① 총괄부서는 기본계획을 토대로 연도별 환경기초조사사업 추진계획(이하 “연도별 추진계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 연도별 추진계획은 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 추진대상 연구과제, 주요내용 및 소요예산

2. 과제별 과제관리부서 지정

3. 과제별 연구기관 선정계획

4. 연구성과 활용계획

제10조(연구과제의 선정) ① 총괄부서는 제9조제2항제1호의 추진대상 연구과제를 미리 선정하여 연도별 추진계획에 반영하여야 한다. 이 경우 기본계획에 제시된 연구과제를 우선 고려하여야 한다.

② 총괄부서는 필요할 경우 수계위 사무국, 수계 내 지자체 및 연구기관 등을 대상으로 연구과제에 대한 수요조사를 실시할 수 있으며, 이에 따라 연구과제를 제안하고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 연구과제 신청서를 총괄부서에 제출하여야 한다.

③ 총괄부서는 제6조에 의한 평가위원회(이하 “평가위원회”라 한다)를 통해 제2항에 따라 제출된 신청서를 평가하여 제9조제2항제1호의 추진대상 연구과제에 포함시킬 과제를 선정할 수 있으며, 구체적인 평가 방법은 별표 1를 따른다.

제11조(연구기관의 선정) ① 과제관리부서에서는 연구기관을「국가계약법」시행령 제21조에 따라 제한경쟁입찰을 통해 선정하는 것을 기본원칙으로 하되, 연구과제의 목적, 특성, 예산 규모 등을 고려하여 다음 각 호의 방법으로 연구기관을 선정 할 수 있다.

1.「국가계약법」시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 및 제27조(재공고입찰이 유찰인 경우)에 따라 수의계약

2. 2년 이상 다년도 연구과제의 경우에는「국가계약법」시행령 제69조에 따라 장기계속계약

② 과제관리부서에서는 연구기관 선정을 위한 입찰공고를 실시할 경우에는「국가계약법」제8조(입찰 공고 등)를 따르며, 입찰공고 내용에는 같은 법 시행령 제36조(입찰공고의 내용)의 내용을 포함하여야 한다.

③ 입찰에 참가하고자 하는 자는 공고내용에 따라 제안서를 작성하여 공고기간 내에 계약담당부서에 제출하여야 한다.

④ 과제관리부서에서는 다음 각 호의 요건을 갖춘 연구기관만을 입찰에 참가하게 하여야 한다.

1.「국가계약법」시행령 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따라 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 연구기관

2. 연구과제 목적, 특성 등에 따라 유사분야 연구실적 보유자 등 입찰자격을 제한할 경우에는「국가계약법」시행령 21조 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 제한경쟁입찰의 제한사항, 제한기준 등에 부합하는 연구기관

⑤ 과제관리부서에서는 평가위원회를 통해 제안서를 평가하여 연구기관을 선정하여야 하며, 제안서 평가의 세부적인 방법은 별표 2를 따른다.

제12조(계약체결 및 연구계획서 제출) ① 제11조에 따라 협상적격자로 선정된 연구기관은 협상이 성립되면 평가위원회 의견, 협상 수용사항 등을 반영하여 제안서를 수정·보완 후 7일 이내에 과제관리부서에 제출하여야 한다.

② 과제관리부서에서는 과업지시서, 산출내역서 등 계약에 필요한 서류를 첨부하여 계약담당부서에 해당 연구기관과 계약체결을 요청하여야 한다.

③ 과제관리부서에서는 연구기관이 제출한 연구계획서를 검토하여 승인하여야 하며, 필요한 경우에는 내용을 보완·수정하도록 조치하거나 추가자료를 요청 할 수 있다.

④ 연구기관에서는 계약일로부터 10일 이내에 계약사항 및 과업지시서에 따라 착수계를 과제관리부서에 제출하여야 한다.

제13조(연구과제 수행 및 감독) ① 연구기관은 계약사항대로 연구용역 사업을 수행하여야 하며, 과제관리부서에서 실시하는 연구과제 점검·평가 등에 성실히 임해야 한다.

② 연구기관에서는 연구책임자가 계약기간의 30% 이상에 해당되는 기간(단, 연 3개월을 초과할 수 없다) 동안 해외에서 체류할 경우 연구과제 수행에 차질이 없도록 사업관리 방안을 마련하여 과제관리부서와 사전 협의하여야 한다.

③ 연구기관은 인건비와 경비의 합의 50% 이내에서 과제의 일부를 외부기관(이하 “위탁연구기관”이라 한다)에 위탁할 수 있다.

④ 연구기관은 제16조에 따라 보고서에「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제18조의2에 따라 정도관리를 받고 적합판정을 받은 시험·검사기관이 생산한 자료를 사용하여야 한다.

⑤ 과제관리부서에서는 연구과제가 적정하게 진행되는지 여부를 확인하기 위해 연구기관으로 하여금 필요한 자료를 제출하도록 요청할 수 있으며, 필요할 경우 현장 확인을 할 수 있다.

제14조(연구사업비 및 물품 관리 등) ① 연구기관은 제12조제3항에 따라 과제관리부서가 승인한 연구계획서에 맞게 연구사업비를 지출하여야 하며, 연구사업비 사용실적을 입증할 수 있는 증빙서류를 구비하여야 한다.

② 과제관리부서에서는 연구기관이 연구사업비 지급을 요청할 경우「국가계약법」제15조(대가의 지급)에 따라 지급하되, 필요한 경우「국고금관리법」제26조(선급과 개산급) 및 같은 법 시행령 제40조제1항제15호에 따라 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위에서 연구사업비를 미리 지급할 수 있다. 다만, 연구기관이 국가기관인 경우에는「국고금관리법」시행령 제41조제1호에 따라 개산하여 지급할 수 있다.

③ 연구기관과 위탁연구기관에서는 연구사업비를 별도의 계정으로 구분하여 관리 및 집행하여야 한다. 다만, 연구기관 자체규정에 따라 연구사업비를 통합 관리하는 기관은 그러하지 아니하다.

④ 연구기관에서는 자산가치가 있는 물품, 장비 등을 불가피하게 구입하고자 할 경우에는 사전에 과제관리부서와 계약담당부서에 검토·승인을 받아야 한다.

⑤ 연구기관에서는 제4항에 따라 취득한 자산에 수계위 사무국에서 정하는 별도의 표시를 하여야 하며, 이에 대한 관리대장을 갖추어 두어야 한다.

⑥ 제4항에 따라 취득한 자산은 연구사업 종료 후에 수계위 사무국에 반납하여야 한다. 다만, 연구기관이 계속 사용하고자 하는 경우에는「물품관리법」제41조제2항(대부의 제한), 같은 법 시행령 제42조(불용품의 양여) 및 제45조(대부료 등)를 준용하여 수계위 사무국과 대부계약을 체결하여 사용하여야 한다.

제15조(사업의 변경) ① 연구기관에서는 다음 각 호의 사항을 변경하고자 할 때에는 별지 제4호 서식의 연구계획서 변경신청서와 변경사항을 확인할 수 있는 서류를 과제관리부서에 제출하여 변경 승인을 받아야 한다.

1. 사업목표 또는 주요 연구내용 변경

2. 연구기간 연장(단, 1회에 한하며 6개월을 초과할 수 없음)

3. 연구사업비 세목간 20%이상 변경

4. 세목의 추가가 필요한 경우

5. 위탁연구기관의 변경

6. 연구책임자 및 참여연구원의 변경

7. 기타 수계위 사무국에서 변경승인이 필요하다고 인정하는 사항

② 과제관리부서에서는 제1항에 따라 연구기관이 변경승인을 요청한 경우 요청을 받은 날로부터 15일 이내에 검토 결과를 연구기관에 통보하여야 한다.

③ 연구기관에서는 다음 각 호의 사항을 변경하고자 할 때에는 연구기관에서 자체 검토·변경 후 15일 이내에 그 내용을 과제관리부서에 통보하여야 한다.

1. 연구기관명, 주소 등의 변경

2. 위탁연구기관 연구책임자 변경

3. 연구사업비 세목간 20% 미만 변경

4. 기타 경미한 사항의 변경

④ 제1항제6호에 의한 연구책임자 변경은 다음 각 호의 경우에 한한다.

1. 연구책임자가 사망한 때

2. 연구기간 중 재임용 탈락 등으로 연구를 수행하지 못할 때

3. 소속 변경 또는 보직 변경으로 연구를 계속 수행할 수 없을 때

4. 기타 질병, 실종, 형사소추 등 불가피한 사유로 인하여 연구를 계속 수행할 수 없을 때

제16조(보고서의 제출) ① 연구기관에서는 기존의 조사·연구 결과를 확인하여 중복된 조사가 이뤄지지 않도록 최대한 기존자료를 활용하되, 기존자료를 보고서에 인용할 경우에는 자료의 출처를 명확히 기재하여야 한다.

② 연구기관에서는 중간보고회 개최 14일 이전(공휴일 포함)까지 별지 제5호 서식에 의한 중간보고서 초안을 작성하여 과제관리부서에 제출하여야 한다.

③ 연구기관에서는 최종(연차)평가회 개최 14일 이전(공휴일 포함)까지 별지 제6호 서식에 의한 최종(연차)보고서 초안을 과제관리부서에 제출하여야 한다.

제17조(평가 및 평가에 따른 조치) ① 과제관리부서에서는 평가위원회를 통해 연구과제에 대한 연차 및 최종 평가를 실시하며 세부적인 평가방법은 별표 3 및 별표 4를 따른다. 다만, 연구과제의 특성을 고려하여 평가 여부, 방법 및 시기를 조정할 수 있다.

② 과제관리부서에서는 제1항에 의한 평가결과를 연구기관에 통보하여야 한다. 이 경우 부적합으로 평가된 연구과제에 대하여 제7조에 따른 행정위원회(이하 “행정위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 연구책임자의 참여제한 또는 제18조에서 규정한 계약의 해제 등의 조치를 취할 수 있다.

③ 연구기관에서는 제2항에 결정된 제재조치에 대하여 그 조치를 통보받은 날로부터 15일 이내에 1회에 한해 이의신청을 할 수 있으며, 과제관리부서에서는 이의신청 내용의 적정여부를 행정위원회의 심의를 거친 후 그 결과를 연구기관에 통보하여야 한다.

제18조(계약의 해제 등) 과제관리부서는「용역계약일반조건(기획재정부계약예규)」제29조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) 및 제30조(사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지) 규정을 준용하여 연구기관과 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제19조(준공보고 및 준공검사) ① 연구기관에서는 사업완료 후 과제관리부서에 준공보고와 함께 다음 각 호에 해당하는 연구성과물을 납품하여야 한다.

1. 최종(연차)보고서 책자 및 전자파일

2. 기타 유·무형의 연구성과물(전산파일, 제작품, 프로그램 등)

② 과제관리부서에서는 제1항의 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약이행을 확인하기 위한 검사를 하고 그 결과를 연구기관에 통보하여야 한다. 준공검사 처리기간의 계산은「민원 처리에 관한 법률」제19조에 따라, 첫날은 산입하되, 공휴일과 토요일은 산입하지 아니한다.

③ 과제관리부서에서는 제2항의 검사에 있어서 연구기관의 계약이행내용 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다.

④ 과제관리부서에서는 제3항에 의해 계약이행기간이 연장될 때에는「국가계약법」제26조(지체상금) 및 같은 법 시행령 제75조(지체상금률)에 따라 연구기관에 지체상금을 부과하여야 한다.

제20조(연구사업비의 정산) ① 연구기관에서는 제19조제2항에 따라 검사 합격통지를 받으면 별지 제7호 서식의 연구사업비 사용실적 보고서와 증빙서류를 과제관리부서에 제출하여야 한다.

② 과제관리부서에서는 제1항의 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 별표 5의 정산기준에 따라 정산금액을 확정하고 이를 계약담당부서에 알려 연구과제 추진에 의한 대가가 지급되도록 조치하여야 한다. 다만, 제14조제2항에 의해 미리 지급되거나 개산하여 지급된 연구사업비 보다 최종 정산금액이 적을 경우 해당 차액과 지정 계좌를 연구기관에 통보하여야 하고, 연구기관에서는 통보 받은 차액을 지정계좌로 즉시 반납하여야 한다.

③ 장기계속계약 등 2년 이상 다년도 연구를 수행할 때 계약일 이전에 이루어진 지출원인행위는 과제관리부서가 인정할 경우에 연구사업비에 계상할 수 있다.

제21조(성과물의 귀속 및 활용) ① 연구과제의 수행으로 얻어지는 지적재산권, 유형적 발생물 및 무형적 결과물은 수계위와 연구기관이 공동으로 소유하되, 수계위가 용역성과물을 대국민 공개한 이후에 연구기관이 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용·수익을 할 수 있다.

② 수계위 사무국은 환경기초조사사업의 최종보고서를 관련 국가기관, 지자체, 연구기관, 학교 및 국공립도서관 등에 배포할 수 있다. 다만, 수계위 사무국이 보안유지가 필요하다고 인정하는 경우 해당 부분을 비공개 처리하여 배포할 수 있다.

③ 연구기관에서는 계약기간 중과 계약기간 이후에 연구 성과물의 활용촉진 및 공유·전파를 위한 활동을 수행하여야 하며, 연구성과 활용을 위해 수계위 사무국이 요청할 경우 이를 이행하여야 한다.

④ 연구기관에서는 사업종료 후 5년간 별지 제8호 서식의 연구성과 활용보고서를 연1회 이상 총괄부서에 제출하여야 한다, 다만 총괄부서와 협의한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 삭제

부  칙

제1조(시행일) 이 지침은 위원회가 심의․의결한 날로부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침이 시행된 이후 계약하는 환경기초조사사업부터 적용한다.

제3조(다른 법령의 적용) 이 지침에서 따로 정하지 않은 예산 편성·집행 및 계약에 관한 사항은「국가계약법」과「국고금관리법」등 정부의 예산집행 관련 규정을 준용할 수 있다.

별 표

1. 과제심의회	13

2. 제안서평가회	15

3. 연차평가회	17

4. 최종보고회	19

5. 연구비사업비 계상 및 정산 기준	21

(별표1)

과 제 심 의 회

□ 목적

○ 금강수계 환경기초조사업 기본계획(5개년)의 연구과제, 정책수요 및 정책 환경 변화에 대응하기 위해 제안된 연구과제 등을 대상으로 당해연도에 추진할 연구과제 선정을 위하여 평가위원회를 구성·운영

< 연구과제 선정절차 >

환경기초조사사업 기본계획 연구과제					⇨	과제심의회 (과제선정)	⇨	추진계획 수립
수요조사에 의해 제안된 연구과제			⇨	사무국 사전검토*	⇨

* 환기조사업과의 합목적성, 다른 사업과의 유사·중복성, 연구성과물 활용성 등

□ 과제심의회 구성·운영

○ 평가방식 : 대면 또는 서면평가

○ 평가위원 : 위원장* 1명을 포함한 10명 내외의 위원으로 구성

* 참석위원 중에서 호선(互選)하되 민간위원을 우선으로 한다.

○ 평가방법 : 연구내용, 연구성과 등 4개 분야, 7개 평가항목으로 구성된 심의평가서를 통해 연구과제 심의·평가

○ 평가점수 : 100점 만점으로, 위원별 평가점수 중 최고점과 최저점을 각 1명씩 제외한 나머지 위원들 점수를 산술평균

※ 산술평균한 값은 소수점 셋째자리에서 반올림

○ 과제선정 : 예산 범위 내에서 고득점 순으로 선정(단, 평가점수가 70점 미만일 경우에는 과제선정에서 제외

※ 총괄부서에서는 사업예산과 평가의견을 반영하여 과업내용 및 연구사업비 확정

환경기초조사사업

'00. 00. 00.(목) 00회의실

심 의 평 가 서(서식)

□ 과 제 명 :

□ 제안기관 : 제안기관명(제안자 : 홍길동 박사)

□ 평 가 표

평 가 항 목		평가등급(◯표시)
		아주 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
연구일반	환경기초 조사·연구의 적합성	10	8	6	4	2
	타 사업과의 차별성·창의성	10	8	6	4	2
연구목표	연구목표의 명확성·타당성	20	16	12	8	4
연구내용	연구의 시급성	10	8	6	4	2
	연구의 필요성	10	8	6	4	2
연구성과	수질개선 기여도	20	16	12	8	4
	정책 및 업무의 활용도	20	16	12	8	4
평 가 점 수(100점)

□ 평가의견

※ 과제 내용, 범위 등에 대한 수정·보완 및 연구사업비 조정에 대한 의견 등을 자유롭게 작성

평가자 소속:         직위(급):       성명:      (서명)

(별표2)

제 안 서 평 가 회

□ 목적

○ 입찰공고에 응찰한 제안기관을 대상으로 용역수행기관 선정 및 유찰에 의한 수의계약 대상자의 수행능력 평가를 위해 평가위원회 구성·운영

< 용역수행기관 선정절차 >

입찰공고 (조달청)	⇨	제안서 제출 (제안기관)	⇨	제안서평가회 (협상대상자 선정)	⇨	협상	⇨	계약체결 (수행기관 확정)

□ 제안서평가회 구성·운영

○ 평가방식 : 대면 또는 서면평가

○ 평가위원 : 위원장* 1명을 포함한 10명 내외의 위원으로 구성

* 참석위원 중에서 호선(互選)하되 민간위원을 우선으로 한다.

○ 평가방법 : 평가기준에 따라 상대평가 실시

○ 평가점수 : 80점 만점으로, 위원별 평가점수 중 최고·저점을 각 1명씩 제외한 나머지 위원들 점수를 산술평균(소수점 셋째자리에서 반올림)

○ 협상업체 선정 : 평가점수가 68점(만점의 85%) 이상일 경우 수행적격자로 판정하여 가격평가점수와 합산 후 최고득점자 순으로 협상

※ 유찰된 경우 수의계약 대상자의 자격요건 검토 후 계약을 체결하거나, 수의계약 대상자를 대상으로 수행능력 평가하여 평가점수가 56점(만점의 70%) 이상일 경우 수행적격자로 판정 후 계약체결

□ 협상 절차 및 사후처리

○ 선순위(先順位) 협상대상자와 협상이 성립된 때에는 차순위(次順位) 협상적격자와 협상을 실시하지 않고 성립된 연구기관과 계약체결

※ 연구기관은 계약체결을 위해 협상내용을 반영하여 연구계획서 작성·제출

○ 모든 협상적격자와 협상이 결렬된 경우에는 재공고 입찰에 부치거나, 용역수행기관 부재로 인한 사업(과제) 철회

환경기초조사사업

'00. 00. 00.(목) 00회의실

평 가 서(기술능력평가)(서식)

□ 용 역 명 :

□ 제안기관 : 제안기관명(제안자 : 홍길동 박사)

□ 평 가 표

평 가 항 목		평가등급(◯표시)
		아주우수	우수		보통		미흡		매우미흡
사업내용 (20점)	사업내용에 대한 이해도	10	8		6		4		2
	제안요청서의 요구사항 만족도	10	8		6		4		2
사업수행계획 (20점)	사업 수행계획의 적정성	10	8		6		4		2
	사업에 대한 기술적 접근방법	10	8		6		4		2
사업수행능력 (30점)	연구책임자의 전문성	10	8		6		4		2
	참여 인력의 구성	10	8		6		4		2
	연구 시설 및 기자재 확보 여부	10	8		6		4		2
사업실적 (10점)	최근 3년, 용역비 3천만원 이상의 유사연구 실적*	10 (5건 이상)		9 (4건)		8 (2~3건)		7 (1건 이하)
평가점수(80점)

* 발주처에서 정량평가 실시

□ 평가의견

평가자 소속:         직위(급):       성명:      (서명)

(별표3)

연 차 평 가 회

□ 목적

○ 사업 전반에 대한 평가 및 전문가 의견 수렴으로 연구성과 제고 등

○ 차년도 연구계획서 평가를 통해 연구의 계속 여부 판정

< 평가회 절차 >

보고서 제출	⇨	연차 평가회	적합 ⇨	연차보고서 제출 (발주처 및 평가의견 반영)			⇨	연구완료
			부적합 ⇨	행정위원회 (제재수위 결정)			⇨	연구중단

□ 평가회 구성·운영

○ 평가방식 : 대면 또는 서면평가

○ 평가위원 : 위원장* 1명을 포함한 10명 내외의 위원으로 구성

* 참석위원 중에서 호선(互選)하되 민간위원을 우선으로 한다.

○ 평가방법 : 당해연도 수행결과(80점)와 차년도 연구계획서(20점)에 대한 10개의 평가항목으로 구성된 평가서로 적합여부 평가

○ 평가점수 : 위원별 평가점수 중 최고점과 최저점을 각 1명씩 제외한 나머지 위원들 점수를 산술평균(소수점 셋째자리에서 반올림)

○ 평가결과 : 평가점수가 70점 이상은 “적합” 판정(70점 미만은 “부적합”)

□ 평가에 따른 조치

○ 과제관리부서는 부적합 과제에 대해 평가점수와 평가의견을 고려하여 제재수위*를 정하고 행정위원회 심의를 거쳐 연구중단 등 제제조치

* 평가점수가 60점 이상은 연구중단(연구과제 종료 또는 수행기관 변경), 60점 미만은 3년 이내 참여제한(연구책임자에게 적용)

○ 연구기관은 제재조치를 통보받은 즉시 연구사업비 잔액을 발주처에 반납

환경기초조사사업

'00. 00. 00.(목) 00회의실

연 차 평 가 서(서식)

□ 계 약 명 :

□ 수행기관 : 수행기관명(연구책임자 : 홍길동 박사)

□ 평 가 표

평 가 항 목		평가등급(◯표시)
		아주 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
당해연도 수행결과 (80점)	조사연구 목표 달성도	15	12	9	6	3
	조사연구 결과의 적정성․우수성	20	16	12	8	4
	조사연구 결과의 정책 활용 가능성	15	12	9	6	3
	실험분석 결과의 신뢰성	10	8	6	4	2
	연구수행방법	15	12	9	6	3
	조사연구 수행노력의 성실도	5	4	3	2	1
차년도 연구계획서 (20점)	연구사업의 수행방법	5	4	3	2	1
	연구기관의 연구시설 확보 정도	5	4	3	2	1
	연구사업 결과의 정책반영 가능성	5	4	3	2	1
	연구사업비의 계상	5	4	3	2	1
평가점수(100점 만점)

□ 평가의견

평가자 소속:         직위(급):       성명:      (서명)

(별표4)

최 종 평 가 회

□ 목적

○ 사업 전반에 대한 평가 및 전문가 의견 수렴으로 연구성과 제고 등

< 평가회 절차 >

보고서 제출	⇨	최종 평가회	적합 ⇨	최종보고서 제출 (발주처 및 평가의견 반영)			⇨	연구완료
			부적합 ⇨	행정위원회 (제재수위 결정)			⇨	제재조치

□ 평가회 구성·운영

○ 평가방식 : 대면 또는 서면평가

○ 평가위원 : 위원장* 1명을 포함한 10명 내외의 위원으로 구성

* 참석위원 중에서 호선(互選)하되 민간위원을 우선으로 한다.

○ 평가방법 : 연구목표 달성도, 성과활용 가능성 등 6개의 평가항목으로 구성된 평가서를 평가기준에 따라 상대평가

○ 평가점수 : 위원별 평가점수 중 최고점과 최저점을 각 1명씩 제외한 나머지 위원들 점수를 산술평균(소수점 셋째자리에서 반올림)

○ 평가결과 : 평가점수가 70점 이상은 “적합” 판정(70점 미만은 “부적합”)

□ 평가에 따른 조치

○ 과제관리부서는 부적합 과제에 대해 평가점수와 평가의견을 고려하여 제재수위*를 정하고 행정위원회 심의를 거쳐 제제조치

* 연구책임자에게 3년 이내 참여제한

○ 연구기관은 제재조치를 통보받은 즉시 연구사업비 잔액을 발주처에 반납

환경기초조사사업

'00. 00. 00.(목) 00회의실

최 종 평 가 서(서식)

□ 계 약 명 :

□ 수행기관 : 수행기관명(연구책임자 : 홍길동 박사)

□ 평 가 표

평 가 항 목	평가등급(◯표시)
	아주 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
연구목표 달성도	30	24	18	12	6
연구결과의 적정성·우수성	10	8	6	4	2
연구결과의 정책활용 가능성	15	12	9	6	3
실험분석 결과의 신뢰성	20	16	12	8	4
연구수행방법(접근방법의 합리성, 연구방법의 타당성)	15	12	9	6	3
연구수행의 성실도	10	8	6	4	2
평 가 점 수(100점 만점)	점

□ 평가의견

평가자 소속:         직위(급):       성명:      (서명)

(별표5)

연구사업비 계상 및 정산 기준

	< 일 반 원 칙 >
□ 연구기관에서는 과제관리부서의 승인을 받아 연구사업비 계상·집행 □ 계약기간 내에 실집행한 금액에 대해서만 인정 □ 용역사업 완료 시점에서 연구사업비 변경은 불가 □ 연구사업비는 전용계좌로 관리하고 정산시 계좌 입·출금 내역 제출

1. 인건비

○ 인건비는 참여연구원에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 직급별 기준단가*에 참여율과 참여기간을 고려하여 산정

* 학술연구용역인건비기준단가(기획재정부계약예규 예정가격작성기준 별표 5)

○ 연구기관의 정규직원으로서 인건비를 전액 지급받는 자의 경우에는 참여율을 최대 20%까지 계상

○ 환경부 및 그 소속기관의 공무원은 인건비 미지급, 공무직 등은 “환경부 무기계약 및 기간제근로자 관리규정(환경부 훈령)”에 따라 계상

○ 참여연구원 중 다른 용역사업과 병행할 경우에는 모든 용역의 참여율 합이 100%를 초과할 수 없음

< 인건비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 인건비 = 직급별 기준단가(원) × 참여기간(월) × 참여율(%)
정산기준	< 증빙서류 > · 지출결의서 · 지급영수증(계좌이체 영수증 등) < 불인정 > · 인건비 집행을 증빙하지 못하는 금액 · 인건비 지급기준을 초과하는 금액(자격기준 미달 포함) · 계약기간을 벗어나서 집행한 금액 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

< 직급별 자격기준 >

직급	자격기준
	대학	기업 등
책임연구원	· 부교수 이상	· 학사학위 취득자로 관련분야 12년 이상 실무경력 보유자 · 석사학위(관련분야 기사 이상의 자격 소지자 포함) 취득자로 관련분야 10년 이상 실무경력 보유자 · 박사학위(관련분야 기술사 자격 소지자 포함) 취득자로 관련분야 5년 이상 실무경력 보유자
연구원	· 조교수 이상	· 학사학위 취득자로 관련분야 10년 이상 실무경력 보유자 · 석사학위(관련분야 기사 이상의 자격 소지자 포함) 취득자로 관련분야 8년 이상 실무경력 보유자 · 박사학위(관련분야 기술사 자격 소지자 포함)로 관련분야 3년 이상 실무경력 보유자
연구보조원	· 석·박사 과정 재학생 이상	· 학사학위 취득자 · 전문학사 취득자로 관련분야 2년 이상 실무경력 보유자 · 관련분야 산업기사 이상 자격 소지자
보조원	· 타자, 계산, 원고정리 등 단순한 업무처리 가능자

※ (자격기준) 자격요건 중 1개 이상에 해당하는 사람

2. 경비

2-1. 여비

○ 여비는 연구자가 계약목적을 달성하기 위하여 여행에 소요되는 비용*으로서 “공무원여비규정(대통령령)”을 준용하여 계상

* 일비, 식비, 운임, 숙박비 등

○ 국내여비는 시외여비만을 대상(시내여비는 교통통신비로 편성 가능)으로 하며 국외여비는 사전에 발주처의 검토·승인을 받아 편성

○ 전문가회의, 보고회 등에 참석한 외부 전문가에게 여비를 지급하고자 할 때에는 사전에 발주처와 협의 필요

○ 부득이한 사유로 자가용을 이용한 경우에는 운임 대신 연료비* 지급

* 연료비 = ①여행거리(㎞) × ②유가 ÷ ③연비

① 한국도로공사(www.roadplus.co.kr)에서 제공하는 거리계산 방법을 활용

② 한국석유공사 유가정보서비스(www.opinet.co.kr)에서 고시된 출장시작일의 유가

③ 한국에너지공단(http://bpms.kemco.or.kr/transport_2012/main/main.aspx) 통계 활용

< 여비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 여비 = 직급별 단가(원) × 인원(명) × 출장횟수(회)
정산기준	< 증빙서류 > · 출장명령서 또는 출장복명서(출장일, 출장지, 출장목적, 출장자, 여비산출내역 등이 포함되어야 함) · 출장이행영수증(연료비, 통행료, 운임비, 숙박비, 식비 등 영수증) · 지출결의서 또는 지급영수증 < 불인정 > · 출장 이행을 증빙하지 못하는 금액(친지숙박, 공동숙박 포함) · 여비 지급기준을 초과하는 금액(숙박비, 운임 등 상한액 초과 등) · 룸서비스, 객실 통신비용 등 목적 외 사용 금액 · 계약기간을 벗어나서 집행한 금액 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

2-2. 유인물비

○ 계약목적 달성에 직접 소요되는 보고서 인쇄, 프린트 및 문헌복사비

○ 중간·최종(연차)보고서 인쇄비는 표지와 내용 비용을 구분하여 계상

< 보고서 인쇄비 참고 기준 >

구분	절수	지질	50부까지 면당단가	10부마다 추가단가	인쇄면수
표지	10절(A4)	아트지 또는 레자크지	12,150원	157원	기본 7.5원
	16절(B5)	아트지 또는 레자크지	8,180원	101원	기본 5.5원
내용	10절(A4)	중질지	6,890원	140원	예상인쇄면수
	16절(B5)	중질지	4,650원	91원	예상인쇄면수

※ 위의 단가는 변환이나 수정을 할 필요 없이 바로 출력하여 제판할 수 있는 파일을 제공할 때의 기준을 말하며, 원판 제공이나 페이지 재구성 등은 추가로 증·감하여야 하고 표지의 색도는 기본 1도의 기준이며 추가색도는 1색도당 2.5매를 가산

< 보고서 인쇄비 산출(예시) >

구분	산출내역
계(표지+내용)	1,615,010원
표지	100부단가｛12,150+(157×5)｝× 인쇄면수기본 7.5매 = 97,010원
내용	100부단가｛6,890+(140×5)｝× 예상인쇄면수 200매 = 1,518,000원

※ (인쇄규격 및 조건) A4 / 200매 / 100부 / 표지 아트지(1색도) / 내용 중질지

< 유인물비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 인쇄비 = 표지 가격(원) + 내용 가격(원) · 복사비 = 단가(40원/매) × 수량(매)
정산기준	< 증빙서류 > · 지출결의서 · 지급영수증(계좌이체 영수증, 카드매출전표, 세금계산서 등) · 유인물 사본 또는 사진대지(보고서 인쇄에 해당) < 불인정 > · 집행을 증빙하지 못하는 금액 · 도서구입비 · 계약기간을 벗어나서 집행한 금액 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

2-3. 전산처리비

○ 계약목적 달성을 위한 컴퓨터(H/W, S/W) 사용료 및 그 부대비용

○ 컴퓨터, 복사기, 프린터, 팩스 등 전산장비에 마우스, 이동식 기억장치, 인쇄용지, 토너, 드럼 등 부수적으로 발생하는 전산소모품 구입비

< 전산처리비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 전산처리비 = 단가(원) × 수량(개)
정산기준	< 증빙서류 > · 지출결의서, 견적서, 지급영수증(카드매출전표, 세금계산서 등) · SW사용료 등 계약서 사본(계약기간, 계약금액 등이 포함되어야 함) < 불인정 > · 집행을 증빙하지 못하는 금액 또는 계약기간을 벗어나 집행한 금액 · 구분이 모호한 금액(본 용역 연구팀의 연구수행을 위한 컴퓨터사용료가 아닌, 기관 전체의 운영비 등) · 자산가치가 있는 하드웨어(H/W)와 소프트웨어(S/W) 구입비 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

2-4. 재료비

○ 계약목적 달성에 필요한 시약, 조사장비 제작비, 외부기관 조사·분석 의뢰비, 유역도 등 주제도 제작비, 사무용품 구입비 등

○ 분석의뢰비, 주제도 제작비 등 추정금액이 2천만 원을 초과하는 경우, 2인 이상의 견적서를 받아 계약자를 선정해야 하고 추정금액이 5천만 원을 초과하는 경우에는 입찰공고를 통해 계약자를 선정

< 재료비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 재료비 = 단가(원) × 수량(개)
정산기준	< 증빙서류 > · 지출결의서, 견적서, 지급영수증(카드매출전표, 세금계산서 등) · 계약서 사본(과업지시서, 계약금액 등이 포함되어야 함) < 불인정 > · 집행을 증빙하지 못하는 금액 또는 계약기간을 벗어나 집행한 금액 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

2-5. 회의비

○ 계약목적 달성을 위한 자문회의, 공청회 등 개최 비용 및 그 부대경비

○ 회의수당*, 식비**, 다과비*** 등은 참석인원에 맞게 계상

* 기본료 150,000원/1인, 2시간 초과시 50,000원 추가(1일 1회에 한정)

** 20,000/1인 이하

*** 2,000원/1인 이하

○ 워크숍, 심포지엄 등에 초청된 강사 등 발표자에게 지급하는 강사료, 원고료 등은「국립환경인재개발원 학칙(국립환경인재개발원 예규)」제25조제4항 [별표1] 강사수당 및 여비 지급기준에 따라 계상

○ 학회 참가비(등록비)는 사전에 발주처의 검토·승인을 받아 편성

< 회의비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 회의수당 = 단가(150,000원) × 인원(명) × 개회 횟수(회) · 회의식비 = 단가(20,000원) × 인원(명) × 개회 횟수(회) · 다 과 비 = 단가(2,000원) × 인원(명) × 개회 횟수(회)
정산기준	< 증빙서류 > · 회의 개최 계획(안) 또는 회의 개최 결과 문서(자문위원 명단 및 회의수당, 식비, 다과비 등 필요 경비가 포함되어야 함) · 지출결의서, 견적서, 지급영수증(카드매출전표, 계좌이체영수증 등) · 회의록, 참석자 명단(서명부), 회의결과(요약), 자문의견서, 사진대지 등 회의 개최 실적을 증빙할 서류 < 불인정 > · 집행을 증빙하지 못하는 금액 또는 계약기간을 벗어나 집행한 금액 · 학회 회원비(연회비·가입비) 등 목적 외 사용 금액 · 증빙서류가 부실한 집행 금액 · 용역수행기관 내부자간 식비 · 용역수행기관 소속의 직원에 지급된 회의수당 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

2-6. 임차료

○ 계약목적 달성을 위하여 꼭 필요한 경우에 한하여 차량·선박, 회의장, 연구기자재 및 시설 등을 임차 비용 및 그 부대비용(연료비 등)

< 임차료 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 임 차 료 = 단가(원/월) × 임차기간(월) × 임차물량(건) · 부대비용 = 단가(원/월) × 임차기간(월) × 임차물량(건)
정산기준	< 증빙서류 > · 지출결의서, 견적서, 지급영수증(카드매출전표, 계좌이체영수증 등) · 계약서 사본, 등 임차 실적을 증빙할 서류 < 불인정 > · 집행을 증빙하지 못하는 금액 또는 계약기간을 벗어나 집행한 금액 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

2-7. 교통통신비

○ 계약목적 달성을 위한 시내교통비*, 전신전화사용료, 우편료** 등

* 4시간 이상 20,000원/인, 4시간 이내 10,000원/인(단, 공용차량 이용시 1만원 삭감)

** 연구기관은 보고서 배포를 위하여 필히 편성

< 교통통신비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 시내교통비 = 단가(원/인) × 인원(명) × 출장횟수(회) · 우편료 등 = 단가(원/부) × 배포량(부)
정산기준	< 증빙서류 > · 출장명령서 또는 출장복명서(출장일, 출장지, 출장목적, 출장자, 여비산축내역 등이 포함되어야 함) · 지출결의서 또는 지급영수증(카드매출전표, 계좌이체영수증 등) < 불인정 > · 집행을 증빙하지 못하는 금액 또는 계약기간을 벗어나 집행한 금액 · 구분이 모호한 금액(본 용역 연구팀의 연구수행을 위한 비용이 아닌, 기관 운영비성 경비 등) · 관외 출장비 및 휴대전화 사용료 · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

3. 일반관리비

○ 일반관리비는 연구기관의 유지를 위한 관리활동 부문에서 발생하는 부대비용으로「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제8조제1항 규정에 따라 비영리기관에 한하여 계상

< 일반관리 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 일반관리비 = (인건비 + 경비) × 일반관리비율(%) 이내
정산기준	< 증빙서류 : 별도의 증빙자료 없이 정산 > < 불인정 > · 계약 또는 연구계획서에 계상된 일반관리비를 초과 집행한 금액 · 집행잔액, 불인정·부적정 금액 등 발생에 의한 일반관리비 초과 집행금액(당초 일반관리비를 정산금액을 기반으로 계약일반관리비율을 적용하여 삭감) · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

4. 이윤

○ 이윤은 연구기관의 영업이익을 말하며,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제8조제2항 규정에 따라 영리기관에 한하여 계상

< 일반관리 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 이윤 = (인건비 + 경비) × 이윤율(%) 이내
정산기준	< 증빙서류 : 별도의 증빙자료 없이 정산 > < 불인정 > · 계약 또는 연구계획서에 계상된 이윤을 초과 집행한 금액 · 집행잔액, 불인정·부적정 금액 등 발생에 의한 당초 이윤을 초과 집행한 금액(당초 이윤을 정산금액을 기반으로 계약이윤율을 적용하여 삭감) · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액

5. 부가가치세

○ 연구기관이 일반과세자인 경우에는「부가가치세법」제30조 규정의 세율을 부가가치세로 계상

< 부가가치세 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 부가가치세 = (인건비+경비+일반관리비·이윤) × 세율(%)
정산기준	< 증빙서류 : 별도의 증빙자료 없이 정산 > < 불인정 > · 집행잔액, 불인정·부적정 금액 등 발생에 의한 부가가치세를 초과 집행한 금액은 불인정(당초 부가가치세를 정산금액을 기반으로 세율을 적용하여 삭감) · 발주처로부터 승인 또는 변경승인 받지 못한 금액은 불인정

6. 위탁연구비

○ 연구의 일부를 외부기관에게 용역을 위탁할 때 소용되는 경비로 사전에 발주처의 승인이 필요하며, 본 지침 “연구사업비 계상 및 정산 기준”과 동일한 방법으로 비목·세목 편성

○ 위탁연구비는 주관연구기관 예산의 50% 이내로 계상

< 위탁연구비 산정방법 및 정산기준 >

구분	내용
산정방법	· 위탁연구비 = 주관연구기관 예산 × 50% 미만
정산기준	· 본 지침 연구사업비 계상 및 정산 기준을 따름

별 지 서 식

1. 연구과제 신청서	31

2. 연구용역 제안서	33

3. 연구계획서	45

4. 연구계획서 변경신청서	56

5. 중간보고서	59

6. 최종(연차)보고서	65

7. 연구사업비 사용실적 보고서	76

8. 연구성과 활용보고서	80

9. 수행실적 보고서	81

< 별지 제1호 서식 >

20  년 환경기초조사사업 연구과제 신청서

(과제관리부서 및 담당자 : 0000과 000 주무관)

제안내용과 관련된 수계위 사무국 담당부서

분 야 명 (해당사항 1군데 ■표)		□ 안전성 ■ 수질·수생태 □ 물순환 □ 협치 □ 기타
과 제 명
주 제 어		내용을 가장 정확히 표현할 수 있는 단어 기재(5개 이상)
연구목적
○ ○
연구의 필요성
○ ○
연구기간 (총 0년·월)	연구사업비(단위 : 백만원)
	합계	20△△	20△△	20△△	20△△	20△△
주요 연구내용
<1차년도> ○ - ○ <2차년도> ○ -
연구결과 활용방안		1. [ ] 기초자료 확보 2. [ ] 원인 분석 및 대책 수립 3. [ ] 제도 개선 및 정책반영
○ 과제관리부서와 협의하여 정책반영 등 활용방안을 구체적으로 작성
선행연구와의 차별성
○
주요 선행연구
○ 연구과제명(연구연도), 연구자, 연구목적, 주요 연구내용 등
신청자 인적사항		*개인정보 수질·이용 동의서 제출
○ 소속 및 부서, 직위, 성명, 연락처, 이메일 등

(별첨)

개인정보 수집‧이용 동의서

금강수계관리위원회에서는 「금강수계 환경기초조사사업 연구과제 신청서」를 제출한 신청자에 대한 개인정보를 수집·이용하고자 하오니, 다음의 사항을 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

□ 개인정보 수집·이용 내역

수집·이용 목적	수집·이용 항목	보유·이용 기간
환경기초조사사업 연구과제 선정	성명, 소속 및 부서, 연락처, 이메일 등	연구과제 선정까지

위의 개인정보를 수집·이용하는데 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 연구과제 선정에 제약이 있음을 알려드립니다. 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까?

동의

미동의

◈ 수집한 개인정보는 정보주체의 동의 없이 수집한 목적 외로 사용하거나 제3자에게 제공되지 않습니다.

◈ 만 14세 미만 아동인 경우 반드시 법적대리인의 동의가 필요합니다.

본인은 위와 같이「개인정보 수집·이용 제공 동의서」내용을 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

20  .    .    .

성명 :              (서명, 날인)

금강수계관리위원회  귀하

< 별지 제2호 서식 >

환경기초조사사업 연구용역 제안서

용 역 명
용역기간	20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.(계약일로부터 00개월)
연구형태	단독( ), 공동수급( )
제안기관	주관연구기관명, 공동연구기관명
연구책임자	소속		직위(급)
	성명		학위(전공)
	전화		휴대전화
	팩스		전자우편
참여연구원	총 00명(책임연구원 0, 연구원 0, 연구보조원 0, 보조원 0)
본인은「금강수계 환경기초조사사업 연구관리지침」제11조제3항에 따라, “계약명”용역을 수행하고자 제안서를 붙임과 같이 제출합니다. 20 년 00월 00일 연구책임자 : (인) 붙임 1. 제안서 1부. 2. 개인정보동의서 1부. 끝.
상기 제안자는 재능이 우수하고 연구의욕이 왕성하여 소기의 연구 성과를 거둘 수 있다고 인정되었기에 귀 위원회의 연구용역 대상으로 추천하며, 선정되는 경우 소정의 기관 책무를 이행하겠습니다. 20 년 00월 00일 연구기관장 : (직인) 금강수계관리위원회 위원장 귀하

목 차

1. 제안개요	0

1-1. 목적 및 배경	0

1-2. 과업 내용 및 범위	0

1-3. 추진전략 및 목표	0

1-4. 제안의 특징 및 장점	0

1-5. 기대성과 및 활용방안	0

2. 제안기관 현황	0

2-1. 일반현황 및 연혁	0

2-2. 조직 및 인원	0

2-3. 유사용역 수행실적	0

2-4. 연구기자재 및 연구시설	0

3. 과업 수행계획	0

4. 사업관리	0

5. 연구사업비	0

6. 기타	0

본 장부터 Page No.를 기입할 것

1. 제안개요

1-1. 목적 및 배경

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

1-2. 과업 내용 및 범위

1-3. 추진전략 및 목표

1-4. 제안의 특징 및 장점

1-5. 기대성과 및 활용방안

< 작성요령 >
· 본 용역의 제안요청 내용을 명확하게 이해한 후 제안 목적 및 범위 등 기술 · 추진전략 및 목표를 정확히 기술하고 본 용역 수행을 위한 지닌 강점 제시 · 기대되는 결과 및 활용방안을 정책적·기술적 측면에서 구체적으로 기술

2. 제안기관 현황   * 아래 기본사항 외에 추가 또는 변경 기재 가능

2-1. 일반현황 및 연혁

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

2-1-1. 제안기관 : 주관연구기관명(주관연구기관), 공동연구기관명(공동연구기관)

※ 공동수급체 구성원 간의 지분률 :

공동수급협정서 사본 첨부

< 공동수급협정서 사본(공동수급일 경우에만 작성) >

2-1-2. 일반현황

< 일반현황 및 연혁(주관연구기관) >

제안사명		대표자
직 원 수	총 000명(상근 0, 비상근 0)	사업자번호
사업분야
주 소
전화번호		FAX
홈페이지
설 립 일	년 월 일
□ 주요연혁 및 기타사항 ○ ○

< 일반현황 및 연혁(공동연구기관) >

제안사명		대표자
직 원 수	총 000명(상근 0, 비상근 0)	사업자번호
사업분야
주 소
전화번호		FAX
홈페이지
설 립 일	년 월 일
□ 주요연혁 및 기타사항 ○ ○

2-2. 조직 및 인원

2-2-1. 수행조직 및 업무분장 : 00분야

< 수행조직 및 업무분장 >

				연구책임자(홍길동)
				업무내용
A분야(김갑동)			B분야(이을동)				C분야(장병동)			D분야(최정동)
연구원	업무내용		연구원		업무내용		연구원	업무내용		연구원	업무내용

※ 4개 분야를 초과하는 경우에는 추가 가능

2-2-2. 참여연구원 : 총 000명(책임연구원 0, 연구원 0, 연구보조원 0, 보조원 0)

< 참여연구원 구성표 >

성명	직급	전공 및 관심분야	담당분야	참여율
홍길동	책임연구원			%
	연구원
	연구보조원
	보조원

※ 본 용역에 참여할 전체 인력에 대하여 기재(채용예정 인력 포함 및 직급별 기재)

2-2-3. 참여연구원 이력 및 실적

2-2-3-1. 홍길동(책임연구원)

< 책임연구원 이력 및 실적 >

성명

홍길동(洪吉童)

생년월일

소속

직위(급)

연락처

사무실 042-865-0833, 휴대전화 010-0000-0000, 전자우편 abced@korea.kr

학력

기간

학교

전공

학위

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

경력

기  간

기관명

직위(급)

업무 분야

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

연구실적

구분	과제명(역할)	연구비	연구기간	지원기관	논문발표 학술지명
완료	과제명(연구책임자(PM)	백만원	´00. 00. ~´00. 00.
수행중	과제명(어류생태 분야 수행관리자(PL)

저서실적

발행년도	저서명	출판사	발행지(국내·외)	비고

연구논문

발표실적

과제명	연구기간	연구논문 발표지명	역할	연구비 지원기관
	´00. 00. ~´00. 00.

기타

2-2-3-2. 홍길동(연구원)

< 연구원 이력사항 >

성명

홍길동(洪吉童)

생년월일

소속

직위(급)

연락처

사무실 042-865-0833, 휴대전화 010-0000-0000, 전자우편 abced@korea.kr

학력

기간

학교

전공

학위

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

경력

기  간

기관명

직위(급)

비고

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

´00. 00.~´00. 00.

연구실적

구분	과제명(역할)	연구비	연구기간	지원기관	논문발표 학술지명
완료	과제명(연구책임자(PM)	백만원	´00. 00. ~´00. 00.
수행중	과제명(어류생태 분야 수행관리자(PL)

저서실적

발행년도	저서명	출판사	발행지(국내·외)	비고

연구논문

발표실적

과제명	연구기간	연구논문 발표지명	역할	연구비 지원기관
	´00. 00. ~´00. 00.

기타

2-2-3-3. 연구원보조원 이하

< 연구보조원 및 보조원 이력사항 >

성명	직급	생년월일	최종출신 학교	학위	연락처	비고
홍길동	연구보조원	´00.00.00			000-0000-0000
	보조원

2-3. 유사용역 수행실적(최근 3년, 3천만원 이상)

사업명	사업기간	계약금액	지원기관
	´00. 00.~´00. 00.	000,000,000원

※ 발주처에서 발행한 실적증명서 등 증빙서류를 첨부(증빙서류 미첨부시 기재하지 말 것)

< 작성요령 >
· 제안사(협력사 포함) 연구실적으로 입찰공고일 기준 최근 3년간 본 용역과 관련된 연구·조사 사업실적을 연도순으로 기재 · 사업비는 3천만원 이상일 경우에 한해 인정(공동도급계약일 경우에는 계약금액에 제안사의 지분만을 기재) · 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 원도급 회사 개재

2-4. 연구기자재 및 연구시설

2-4-1. 보유현황

기자재 및 시설 명	규격	수량	용도	구입년도	내구년수

2-4-2. 확보 및 활용방안

3. 과업 수행계획

< 작성요령 >
· 제안요청서의 과업별 조사·연구 내용, 방법 및 절차를 구체적으로 작성

3-1. 연구목표

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

3-2. 연구내용 및 방법

< 용역사업 추진절차 >

1차년도 (0000년)
				금강수계 오염원 조사				통합관리시스템 구축에 필요한 내용 및 오염 총량관리 관련내용 도출
		조사지역의 하천수리와 지형 지질 조사 및 기초자료 조사			조사지역의 오염원 현황조사 (가정하수, 공장폐수, 축산폐수, 기타 오염원)			토구현황파악을 통한 문제점 도출
				측정자료 분석 및 평가
				유역모델과 수질모델의 보정 및 검증을 통한 오염부하량 할당량 산정
				수질목표달성을 위한 오염삭감 계획제시					통합관리시스템 구축에 필요한 내용 등 작성․제출

< 용역사업 추진일정(호소조사 예시) >

연번	사업 내용	추 진 일 정 (월)												기간 (주)
		20 년						20 년
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	사전답사 및 지점선정													(4)
2	일반현황·오염원 조사													(28)
3	호소 수질조사													(16)
4	동·식물플랑크톤 조사													(16)
5	저서무척추동물 조사													(8)
6	어류 조사													(8)
7	양서류 조사													(8)
8	수생식물 조사													(8)
9	종합진단 및 평가													(20)
10	보고회(착수·중간·최종)													(12)
11	최종보고서 작성													(8)

4. 사업관리

< 작성요령 >
· 연구 성과를 극대화하고 효과적으로 사업 추진을 유도할 수 있는 방안 제시 · 정도관리 계획, 주요 연구비 사용계획, 공동수급체 구성원간 상호협력 방안, 과업 진행사항 보고 등 용역관리 방안 기술

4-1. 품질 제고방안

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

※ 시료 채취, 시험분석 항목에 대한 정도관리 계획 등

4-2. 연구원 관리방안

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

4-3. 수행실적 보고 및 조치계획

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

4-4. 사업 평가항목 및 평가방법

평가항목	평가의 착안점 및 척도	가중치(%)
1.
2.
3.
4. 조사대상지역 오염원 현장조사	○ 대상유역의 환경특성 및 오염원 조사에 대한 근거가 타당한지에 대한 검토 - 방치축분, 축사, 시설재배지 등 오염부하량 산정 근거자료	20%

※ 본 연구의 성과를 검증하기 위한 평가항목 및 그 항목별 평가방법을 작성

< 외부 전문가 활용계획(필요시 작성) >

소속 및 부서	직위(급)	연구 및 관심분야	활용계획	활용기간	소요경비

5. 연구사업비

비목	금액(원)	산출내역	비율
합계		(1+2+3+4+5+6)
1. 인건비 1) 책임연구원 2) 연구원 3) 연구보조원 4) 보조원		기준단가 × 0인 × 00개월 × 00% ÷ 100 기준단가 × 0인 × 00개월 × 00% ÷ 100 기준단가 × 0인 × 00개월 × 00% ÷ 100 기준단가 × 0인 × 00개월 × 00% ÷ 100	30%
2. 경비 1) 여비 - 책임급 - 원급 이하 2) 유인물비 - 보고서 - 복사비 3) 전산처리비 - SW사용료 - 전산용품 4) 재료비 - 시약 등 - 분석료 5) 회의비 - 회의수당 - 식음료 6) 임차료 - 시설임차 - 차량임차 7) 교통·통신비 - 시내교통비 - 우편 등		책임연구원 단가 × 0인 × 0회 연구원이하 단가 × 0인 × 0회 보고서 단가 × 00부 복사비 단가 × 00장 라이센스 단가 × 수량 전산용품 단가 × 수량 단가(주요내역 첨부) × 1식 단가 × 항목 × 시료량 단가 × 0명 × 0회 단가 × 0명 × 0회 단가 × 0회 단가 × 0회 단가 × 0인 × 0회 단가 × 수량
3. 일반관리비		(1+2)의 6% 이내
4. 이윤		(1+2+3)의 10% 이내
5. 부가가치세		(1+2+3+4)의 10%
6. 위탁연구비		(1+2+3+4+5)의 50% 미만

6. 기타(참고문헌, 위탁기관 현황 등)

(별첨)

개인정보 수집‧이용 동의서

금강수계관리위원회에서는 「금강수계 환경기초조사사업 연구과제 제안서」를 제출한 제안자에 대한 개인정보를 수집·이용하고자 하오니, 다음의 사항을 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

□ 개인정보 수집·이용 내역

수집·이용 목적	수집·이용 항목	보유·이용 기간
환경기초조사사업 수행기관 선정	소속, 직위(급), 성명, 생년월일, 학력, 경력, 연락처 등	수행기관 선정까지

위의 개인정보를 수집·이용하는데 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 연구과제 선정에 제약이 있음을 알려드립니다. 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까?

참여연구원			개인정보 수집·이용 동의여부(√표시)		본 동의서 제출 여부(서명, 날인)
소속	직급	성명	동의	미동의
	책임연구원	홍길동
	연구원

※ 수집한 개인정보는 정보주체의 동의 없이 수집한 목적 외로 사용하거나 제3자에게 제공되지 않습니다.

20  .    .    .

연구책임자  성명 :              (서명, 날인)

금강수계관리위원회  귀하

< 별지 제3호 서식 >

환경기초조사사업 연구계획서

사 업 명	20 년 금강수계 환경기초조사사업
계 약 명
계약기간	20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.(00년 00월)
계약금액	000,000,000원
수행기관	주관연구기관명, 공동연구기관명
연구책임자	소속, 부서, 성명 직위(급)
참여연구원	총 00명(책임연구원 0, 연구원 0, 연구보조원 0, 보조원 0)
「금강수계 환경기초조사사업 연구관리지침」제12조제1항에 따라, “계약명”용역 연구계획서를 붙임과 같이 제출합니다. 붙임 1. 연구계획서 1부. 2. 개인정보동의서 1부. 끝. 년 월 일 연구책임자 : (인) 연구기관장 : (직인) 금강수계관리위원회 위원장 귀하

목 차

1. 연구 개요	0

1-1. 연구 배경	0

1-2. 연구 목적 및 필요성	0

2. 연구 내용 및 방법	0

2-1. 연구 목표	0

2-2. 연구 내용	0

3. 사업관리 및 성과품	0

3-1. 수행실적 보고	0

3-2. 수행조직 및 업무분장	0

3-3. 추진일정	0

3-4. 연구기자재 및 연구시설	0

3-5. 외부 전문가 활용계획	0

3-6. 연구 성과품	0

4. 기대성과 및 활용방안	0

4-1. 기대성과	0

4-2. 활용방안	0

5. 연구사업비	0

본 장부터 Page No.를 기입할 것

1. 연구(조사) 개요

1-1. 연구 배경

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

1-2. 연구 목적 및 필요성

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

< 작성요령 >
· 국내외 정책현황, 연구 동향 등 과업 배경 기술 · 과업수행의 최종목표 및 중요성(필요성)을 구체적으로 기술

2. 연구 내용 및 방법

2-1. 연구목표

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

2-2. 연구내용

○ 휴먼명조 11pt

< 연구 추진체계(예시) >

			대청호 상류 지류·지천 모니터링 (연구책임자 : 홍길동)
	유역현황 조사 (문헌, 旣연구 조사·분석 등)			수질·유량 모니터링 (00개 지점, 건기 0회, 우기 0회)			오염원 현장조사 (방치축분, 시설재배지 등)
			오염원 규명 및 관리대책(안) 마련 (수질모델링을 통한 효과 예측)
			지역주민 및 관계기관 설명회 개최 (대책안 의견 수렴 및 보완)
			조사대상하천 수질개선대책(안) 제시

※ 연구 분야, 추진 절차 등 추가 가능

2-3. 연구방법

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

< 작성요령 >
· 제안요청서(과업지시서) 등을 토대로 과업수행 내용 및 범위를 명확하게 기술 · 연구목표 달성을 위한 과업별 수행방법(적용기법)을 구체적으로 기술

3. 사업관리 및 성과품

3-1. 수행실적 보고

과업내용	시기	비고
착수보고회	계약일로부터 00개월 이내	연구계획서 00부, 발표자료 00부
중간보고회	계약일로부터 00개월 이내	중간보고서 00부, 발표자료 00부
최종보고서	계약완료 00일(1개월) 이전	최종보고서 00부, 발표자료 00부
대면보고	필요시 감독관과 협의	회의자료, 회의결과 및 조치계획 제출
수행실적보고	매월 00일(월 1회)	수행상황보고서 제출

※ 시기는 과업지시서(계약서)와 일치하게 작성

3-2. 수행조직 및 업무분장

수행기관					담당연구 내용
기관명 (총 00명)					· 홍길동 : 담당연구내용 ·
		공동수급체					담당연구 내용
		기관명 (총 00명)					· 홍길동 : 담당연구내용 ·
		공동수급체					담당연구 내용
		기관명 (총 00명)					· 홍길동 : 담당연구내용 ·

< 참여연구원 구성표 >

소속	성명	직급	최종학위	전공 및 관심분야	참여율
	홍길동	책임연구원			%
		연구원
		연구보조원
		보조원

※ 채용예정 인력 포함 및 직급별 기재

3-3. 추진일정(호소조사 예시)

연번	사업 내용	추 진 일 정 (월)												기간 (주)
		20 년						20 년
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	사전답사 및 지점선정													(4)
2	일반현황·오염원 조사													(28)
3	호소 수질조사													(16)
4	동·식물플랑크톤 조사													(16)
5	저서무척추동물 조사													(8)
6	어류 조사													(8)
7	양서류 조사													(8)
8	수생식물 조사													(8)
9	종합진단 및 평가													(20)
10	보고회(착수·중간·최종)													(12)
11	최종보고서 작성													(8)

3-4. 연구기자재 및 연구시설

기자재 및 시설 명	규격	수량	용도	구입년도	내구년수

3-5. 외부 전문가 활용계획

소속 및 부서	직위(급)	연구 및 관심분야	활용계획	활용기간	소요경비

3-6. 연구 성과품

제출목록	수량	비고
착수·중간·최종보고서(안)	각 00부	보고회 당일 제출
최종보고서 인쇄본	00부	준공계 제출시 제출
사업성과 포스터(너비 841㎜ × 높이 1,189㎜)	00부	준공계 제출시 제출
USB - 착수·중간·최종보고회 발표자료(PPT, PDF) - 착수·중간·최종보고회 보고서(HWP, PDF) - 최종보고서 초록(HWP, PDF) - 성과발표회 발표자료(PPT, PDF) - 성과발표회 포스터 전시자료(PPT, PDF) - 보고서 작성시 인용한 참고문헌 - 연구·조사에서 생산한 사진, 동화상 등 - 분석항목별 분석결과 전산파일 - QA/QC 증빙자료 - Raw Data 등 조사·연구 결과 D/B	0매 각 1식 각 1식 각 1식 각 1식 각 1식 1식 1식 1식 1식 1식	준공계 제출시 제출

※ 수행기관은 위 필수 제출목록 외로 제출할 성과품이 있을 경우에는 필히 추가 작성

4. 기대성과 및 활용방안

4-1. 기대성과

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

4-2. 활용방안

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

< 성과활용 계획(안) >

성과 유형*	논문 제목 등(게재지 등)	시기
논문게재	비점오염원 유출특성 분석과 원단위 검증에 관한 연구(한국환경분석학회)	´19.0월

* 정책활용, 심포지움, 학술발표, 논문게재, 언론보도, 외부강연 등

5. 연구사업비

5-1. 연구사업비 총괄표

연번	비목·세목	금액(원)	비율(%)	비고
합계
1	인 건 비
2	경 비 - 여비 - 유인물비 - 전산처리비 - 재료비 - 회의비 - 임차료 - 교통·통신비
3	일반관리비
4	이 윤
5	부가가치세
6	위탁연구개발비

※ 위탁연구개발비는 50%를 초과 할 수 없음

5-2. 비목별 산출내역서

5-2-1. 인건비

성명	직급	총액 (A×B×C/100)	기준단가* (A)	참여기간 (B)	참여율 (C)	비고**
합계		100,000,000
홍길동	책임연구원	10,000,000	10,000,000원	12개월	20%
	연구원
	연구보조원
	보조원

* ‘학술연구용역인건비기준단가(기획재정부 계약예규)’를 용역 참여율 100%로 환산한 금액

** 참여연구원 중 타 사업에 참여하고 있는 자는 사업명과 참여율을 별도로 작성

5-2-2. 경비

5-2-2-1. 여비

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
책임연구원		단가 × 0인 × 0회
연구원 이하		단가 × 0인 × 0회

5-2-2-2. 유인물비

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
보고서 인쇄비		표지 가격 + 내용 가격	00부, 000매
복사비		40원/장 × 수량

< 보고서 인쇄비 참고 기준 >

구분	절수	지질	50부까지 면당단가	10부마다 추가단가	인쇄면수
표지	10절(A4)	아트지 또는 레자크지	12,150원	157원	기본 7.5원
	16절(B5)	아트지 또는 레자크지	8,180원	101원	기본 5.5원
내용	10절(A4)	중질지	6,890원	140원	예상인쇄면수
	16절(B5)	중질지	4,650원	91원	예상인쇄면수

※ 위의 단가는 변환이나 수정을 할 필요 없이 바로 출력하여 제판할 수 있는 파일을 제공할 때의 기준을 말하며, 원판 제공이나 페이지 재구성 등은 추가로 증·감하여야 하고 표지의 색도는 기본 1도의 기준이며 추가색도는 1색도당 2.5매를 가산

< 보고서 인쇄비 산출(예시) >

구분	산출내역
계(표지+내용)	1,615,010원
표지	100부단가｛12,150+(157×5)｝× 인쇄면수기본 7.5매 = 97,010원
내용	100부단가｛6,890+(140×5)｝× 예상인쇄면수 200매 = 1,518,000원

※ (인쇄규격 및 조건) A4 / 200매 / 100부 / 표지 아트지(1색도) / 내용 중질지

5-2-2-3. 전산처리비

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
SW사용료		라이센스 단가 × 수량
전산용품		전산용품 단가 × 수량

5-2-2-4. 재료비

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
시약*		단가 × 수량	규격, 단위
분석료		분석항목 × 단가 × 시료량

* 시약은 개별적으로 규격과 단위를 필히 기재

5-2-2-5. 회의비

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
회의수당*		단가 × 00명 × 0회
식음료		단가 × 00명 × 0회

* 외부 전문가에게 기본수당 15만원, 2시간 초과시 1회 한하여 5만원 추가

5-2-2-6. 임차료

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
시설임차		단가 × 0회
차량(선박)임차		단가 × 0대 × 0개월(회)
차량유류비		단가 × 0대 × 0개월(회)

5-2-2-7. 교통·통신비

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
시내교툥비*		단가 × 0인 × 0회
우편 등		단가 × 수량	보고서 배포

* 근무지내 국내출장은 출장 여행시간이 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원 지급(다만, 공용차량 및 임차차량을 사용하면 1만원을 감액)

5-2-3. 일반관리비 및 이윤

구분	총액(원)	산출내역	비고
합계
일반관리비		(인건비 + 경비) × 6% 이내	비영리기관
이윤		(인건비 + 경비) × 10% 이내	영리기관

※ 계약상대자가 비영리기관일 경우 일반관리비, 영리기관일 경우 이윤으로 계상

5-2-4. 부가가치세 : (인건비 + 경비 + 일반관리비 및 이윤) × 10%

5-2-5. 위탁연구비 : 주관연구기관 예산 × 50% 미만

※ 위탁연구비 편성은 사전에 발주처의 승인이 필요하며, ‘예정가격작성기준(기획재정부 계약예규)’ 내 ‘제4절 학술연구용역 원가계산’과 동일한 방법으로 비목·세목 편성

< 위탁기관 현황 >

위탁 과제명
연구기간	20 . 00. ~ 20 . 00.(00개월)
위탁 연구비*	00,000,000원
연구책임자	소속, 부서, 성명, 직위, 연락처 등
위탁 주요내용
입찰방식	일반경쟁입찰, 제한경쟁입찰 등
계약방법	협상에 의한 계약, 수의계약 등

* 총 연구사업비의 00%

6. 참고문헌

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

(별첨)

개인정보 수집‧이용 동의서

금강수계관리위원회에서는「금강수계 환경기초조사사업(연구용역) 연구계획서」를 제출한 수행기관의 참여연구원에 대한 개인정보를 수집·이용하고자 하오니, 다음의 사항을 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

□ 개인정보 수집·이용 내역

수집·이용 목적	수집·이용 항목	보유·이용 기간
용역사업 관리	소속, 직위(급), 성명, 학력, 전공 등	용역사업 완료시까지

위의 개인정보를 수집·이용하는데 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 연구과제 선정에 제약이 있음을 알려드립니다. 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까?

참여연구원			개인정보 수집·이용 동의여부(√표시)		본 동의서 제출 여부(서명, 날인)
소속	직급	성명	동의	미동의
	책임연구원	홍길동
	연구원

※ 수집한 개인정보는 정보주체의 동의 없이 수집한 목적 외로 사용하거나 제3자에게 제공되지 않습니다.

20  .    .    .

연구책임자  성명 :              (서명, 날인)

금강수계관리위원회  귀하

< 별지 제4호 서식 >

연구계획서 변경신청서

사 업 명

20  년 금강수계 환경기초조사사업

계 약 명

계약기간

20  . 00. 00. ～ 20  . 00. 00.

계약금액

원

수행기관

수행기관명(연구책임자 : 홍길동)

「금강수계 환경기초조사사업 연구관리지침」제15조제1항에 따라, 위 계약에 대한 연구계획서를 다음과 같이 변경하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

1. 연구원 변경 및 참여율 조정 등

구분	변경 전			변경 후			변경사유 (변경일자)
	성명	직급	참여율	성명	직급	참여율
연구원 대체			%			%
참여율 조정			%			%
...

2. 연구사업비 변경

구분	변경 전(원)	변경 후(원)	증감(원)	변경사유
합계
인건비
국내여비
...

3. 과업내용 변경(주요사항 위주)

쪽	변경 전	변경 후	변경사유
p00
...

붙임 1. 연구계획서 변경 내용 및 사유

2. 증빙서류

년     월     일

연구책임자 :            (인)

수행기관장 :           (직인)

금강수계관리위원회 위원장 귀하

(붙임 1)

연구계획서 변경 내용 및 사유

< 2020. 0. 00.(화), 소속 및 부서 >

□ 목적 및 배경  * 연구계획서 변경하게 된 목적 및 배경 기술

○

○

	< 용역개요 >
· (계 약 명) · (계약기간) ’00.00.00 ~ ’00.00.00(계약금액 : 원) · (수행기관) 수행기관명(연구책임자 : 홍길동) · (주요과업)

□ 변경 사유

○ (필요성 등)

○

□ 연구계획서(연구원, 연구사업비 및 과업 등) 변경 내용

○ (변경내역)

○

< 연구원 변경 >

구분	당초	변경
소속	주관 또는 공동연구기관명
성명
연구직급	책임연구원, 연구원, 연구보조원
최종학위	공학사(환경공학)
담당업무	수질분석 및 QA/QC
참여율	%
참여기간	20 . 00. 00 ~ 20 . 00. 00
변경사유	퇴사, 이직 등	기존 인력 대체

※ 직급 증빙서류, 보안각서, 저작물 저작재산권 양도계약서 등 제출서류는 별도 첨부

< 참여율 조정 >

성명	연구직급	참여기간	참여율(%)		변경사유
			변경 전	변경 후
	책임연구원	´00.00.00~´00.00.00
	연구원
	연구보조원

< 연구사업비 변경 >

구분		변경 전 (원)	변경 후 (원)	증감 (원)	증감률 (%)	변경사유*
합계
인건비
경비	여비			△(감소)
	...
일반관리비
....

* 육하원칙에 따라 구체적(변경물량 등)으로 기술

< 과업내용 변경 >

쪽	당초	변경	변경사유
p00	연구계획서 내 과업내용
...

□ 행정 사항

○ (변경에 따른 조치사항 등)

○

< 별지 제5호 서식 >

중간보고서

사 업 명	20 년 금강수계 환경기초조사사업
계 약 명
계약기간	20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.(00년 00월)
계약금액	000,000,000원
수행기관	주관연구기관명, 공동연구기관명
연구책임자	소속, 부서, 성명 직위(급)
참여연구원	총 00명(책임연구원 0, 연구원 0, 연구보조원 0, 보조원 0)
「금강수계 환경기초조사사업 연구관리지침」제16조제2항에 따라, “계약명”용역 중간보고서 및 발표자료를 붙임과 같이 제출합니다. 붙임 1. 중간보고서(안) 1부. 2. 발표자료 1부. 끝. 년 월 일 연구책임자 : (인) 연구기관장 : (직인) 금강수계관리위원회 위원장 귀하

20  년 금강수계 환경기초조사사업(중고딕, 14pt, 왼쪽 정렬)

연구과제명(중고딕, 20pt, 가운데 정렬)

중 간 보 고 서(중고딕, 18pt, 가운데 정렬)

영문명(신명조, 15pt, 가운데 정렬)

금강수계관리위원회(신명조, 19pt, 가운데 정렬)

(수행기관명)(신명조, 17pt, 가운데 정렬)

제    출    문

금강수계관리위원회 위원장 귀하

본 보고서를 “연구과제명”용역의 중간보고서로 제출합니다.

20  년   00월   00일

연구기관명  :

연구책임자  :

연  구  원  :

연구보조원  :

보  조  원  :

중간보고서(요약)

	< 사업 개요 >
· (계 약 명) · (계약기간) 20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00. / (계약금액) 000,000,000원 · (수행기관) / (연구책임자) · (주요내용) · (추진경위) 착수계(´00.00) → 착수보고회(´00.00) → 자문회의(´00.00)

□ 목적 및 배경

○ 연구 배경

○ 연구 목적 및 필요성

< 사업 현황, 범위, 내용 등 >

표, 그림, 그래프 등	표, 그림, 그래프 등

□ 연구 결과

○ (과업내용) 추진실적 2~3줄 요약 기술

- 추진실적 세부설명

< 조사·연구 결과 등 >

표, 그림, 그래프 등	표, 그림, 그래프 등

□ 향후 계획

○

목      차

제1장 서론	00

제1절 연구 배경	00

제2절 연구 목적 및 필요성	00

제2장 국내·외 연구 현황	00

제1절 국내 연구현황	00

제2절 국외 연구현황	00

제3장 연구 내용 및 범위, 방법	00

제1절 연구 내용 및 범위	00

제2절 연구 방법	00

제4장 중간 결과 및 고찰	00

제5장 향후 추진계획	00

□ 참고문헌	00

< 작성요령 >
· 목차의 항목은 용역사업 특성에 따라 변경 가능 · 연구사업비 집행내역, 자문의견 조치결과 등은 부록으로 작성하여 제시

제1장 서론(중고딕, 15pt, 가운데 정렬)

제1절(휴먼명조, 13pt, 왼쪽 정렬, 진하게)

○ 본문(휴먼명조 11pt)

- 세부내용(휴먼명조 11pt)

제2절(휴먼명조, 13pt, 왼쪽 정렬, 진하게)

< 표 00. 표제목 > (중고딕, 11pt, 가운데 정렬, 캡션 사용금지)

측정지점	목표수질	측정항목 1	측정항목 2	측정항목 3	비고
A 지점
B 지점
C 지점

(출처 : 자료출처 명시)

그림

< 그림 00. 그림 제목(출처 : 출처명시) >(중고딕, 11pt, 가운데 정렬, 캡션 사용금지)

< 작성요령 >
· 본문에 참고문헌을 인용하는 경우에는 다음의 예에 준한다. 예1) 저자가 1명인 경우 : (Kim, 2019) 또는 (김, 2019) 예2) 저자가 2명인 경우 : (Kim & Lee, 2019) 또는 (김과 이, 2019) 예3) 저자가 3명 이상인 경우 : (Kim et al., 2019) 또는 (김 등, 2019) 예4) 문헌이 출판 중인 경우 : (Kim, in press) 또는 (김, 인쇄중) 예5) 논문으로 발표되지 않은 경우 : (Kim, pers. comm.), (Kim, pers. obs.) 예6) 동일 저자의 문헌을 2편 이상 연속 인용할 경우 : (Kim, 2018, 2019) 예7) 여러 개의 문헌이 동시에 인용될 경우 : (Kim, 2018; Lee et al., 2019) · 참고문헌 기재시, 인용문헌은 국문을 가나다 순으로우선 배열한다. 이어서 중문과 일본어로 표기된 문헌을 훈음에 따라 배열하고, 영어, 불어, 독어 등 라틴문자의 문헌을 알파펫 순으로 배열한다. 동일한 저자에 의해 출판된 문헌이 2편 이상인 경우 영어 알파벳 소문자를 년도 뒤에 붙여 구분한다. 또한, 같은 년도에 다른 저자에 의해 출판된 문헌이라도 본문에 인용시 표시 양식이 같은 경우 알파벳 소문자로 구분한다. 학술잡지는 저자명, 년도, 제목, 잡지명, 권, 페이지 순으로 개재한다. 단행본의 경우에는 저자명, 년도, 도서명(출판횟수), 출판사명, 출판도서명, 페이지 순으로 한다. 학위논문의 경우에는 저자명, 년도, 제목, 수여대학교, 수여도시명, 국가, 페이지 순으로 한다. 연구보고서의 경우에는 저자명, 년도, 제목, 발행기관, 페이지 순으로 한다.

< 별지 제6호 서식 >

최종(연차)보고서

사 업 명	20 년 금강수계 환경기초조사사업
계 약 명
계약기간	20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.(00년 00월)
계약금액	000,000,000원
수행기관	주관연구기관명, 공동연구기관명
연구책임자	소속, 부서, 성명 직위(급)
참여연구원	총 00명(책임연구원 0, 연구원 0, 연구보조원 0, 보조원 0)
「금강수계 환경기초조사사업 연구관리지침」제19조제1항에 따라, “계약명”용역 최종(연차)보고서를 붙임과 같이 제출합니다. 붙임 1. 최종(연차)보고서(안) 1부. 2. 연구 성과물이 수록된 USB 5매. 끝. 년 월 일 연구책임자 : (인) 연구기관장 : (직인) 금강수계관리위원회 위원장 귀하

최종(연차)보고서 서식

□ 인쇄규격

○ (크    기) A₄규격 (가로 210mm×세로 296mm)

○ (제    본) 좌철

○ (용    지) 표지 200g/m․양면 아트지, 내용 80g/m․모조지

○ (인쇄방식) 표지 바탕 백색· 활자 흑색, 내용 흑색 지정활자로 인쇄

○ (표지측면) 5년 주기로 바탕색 표기

< 보고서 측면 바탕색 표기(예시) >

뒷면	측면	앞면
	↑ 5㎝ ↓		↑ 2㎝ ↓
		←1㎝→	발간등록번호	↑ 2~3㎝ ↓
	2019년*		00-0000000-000000-00
	과제명		← 4.5 ~ 6㎝ →
		0000년 금강수계 환경기초조사사업 과 제 명

* (측면 바탕색) ’19년 주황, ’20년 노랑, ’21년 빨강, ’22년 녹색, ’23년 파랑

□ 보고서 구성

○ 표  지

○ 제출문

○ 요약문

○ Summary

○ Contents

○ 목  차

○ 본  문

○ 뒷면지

< 표지 서식 >

(뒷면)                                (앞면)

			↑ 5cm ↓		↑ 2cm ↓
				← 1cm →	발간등록번호	↑ 2cm ↓
					00-0000000-000000-00
			(바탕색 표시)		← 4.5 ~ 6cm →
			20XX
				0000년 금강수계 환경기초조사사업 (14포인트 중고딕체, 왼쪽정렬) 연 구 과 제 명 (20포인트 중고딕체) 0년차(최종) 보고서 (18포인트 중고딕체) 영 문 명 (15포인트 신명조체)				↑ 29.6cm ↓
			연구과제명금강수계관리위원회
	주 의
(15포인트 중고딕체) ↑ 6cm ↓			↑ 3cm ↓	금강수계관리위원회 (19포인트 신명조체) (연구기관) (17포인트 신명조체) ↑ 4cm ↓
				← 21.0cm →

< 제출문 >

제    출    문

금강수계관리위원회 위원장 귀하

본 보고서를「000에 관한 연구(연구기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일)」용역의    최종(연차)보고서로 제출합니다.

년    월    일

연구기관명     :

연구책임자     :

연  구  원     :

〃         :

〃         :

< 요약문 >

요    약    문

□ 목적 및 배경

○

○

□ 연구 내용 및 범위

○

○

□ 연구결과 및 고찰

○

-

※

-

○

-

-

□ 결론

○

○

□ 연구결과의 활용방안 및 기대효과

○

○

< Summary >

S U M M A R Y

( 영 문 요 약 문 )

< Contents >

C O N T E N T S

( 영  문  목  차  )

< 목  차 >

목      차

제1장 서론	00

제1절 연구 배경	00

제2절 연구 목적 및 필요성	00

제2장 국내·외 연구 현황	00

제1절 국내 연구현황	00

제2절 국외 연구현황	00

제3장 연구수행 내용, 방법 및 범위	00

제1절 000	00

제2절 000	00

제4장 연구결과 및 고찰	00

제1절 0000	00

제2절 0000	00

제5장 결론	00

제6장 연구결과의 활용방안 또는 향후 계획	00

제7장 연구목표 달성도 및 대외기여도	00

참고문헌 및 부록

※ 연구용역 특성에 맞게 목차는 변경 가능

< 분  문 >

제1장 서론(중고딕, 18pt, 가운데 정렬)

제1절(휴먼명조, 16pt, 왼쪽 정렬, 진하게)

본문(휴먼명조, 11pt)  ※ 연구(조사)의 배경, 목적 및 필요성을 서술(중요부문)

(간격) 절과 절사이 11pt,절과 본문사이 5pt, 본문과 본문사이 5pt

제2절

○ 휴먼명조 11pt

- 휴먼명조 11pt

제2장 국내·외 연구 현황

※ 관련분야 연구 동향 및 본 연구(조사)에 활용 가능한 연구 성과 위주로 기술

제3장 연구수행 내용, 방법 및 범위

※ 이론적, 실험적 접근방법, 연구내용, 연구결과를 기술

제4장 연구결과 및 고찰

제5장 결론

제6장 연구결과의 활용방안 또는 향후 계획

※ 본 연구(조사) 성과의 활요방안, 기대효과 및 추가 연구계획 등 기술

제7장 연구목표 달성도 및 대외기여도

※ 과업지시서와 연구계획서에 근거한 연구목표의 달성도 및 관련분야 성과 활용도, 기여도 등 기술

참고문헌

※ 보고서 작성시 인용된 참고문헌을 열거

부록

※ 본문 내용을 부연 설명할 수 있는 자료를 덧붙임

< 본문 작성요령 >
○ 본문의 순서는 장, 절, 1, 가, (1), (가), ①, ㉮ 등 또는 1, 1-1, 1-1-1 등으로 하고 장은 18포인트 중고딕체 가운데 정렬, 절은 16포인트 휴먼명조체 진하게 왼쪽 정렬, 본문은 14포인트 휴먼명조로 한다. ○ 본문의 여백은 가급적 없애고 장은 원칙적으로 홀수 쪽에서 새로이 시작하는 것으로 한다. ○ 쪽 번호는 하단 중앙에 12포인트로 제출문부터 로마자 소문자로 작성하며, 본문부터 아라비아 숫자로 시작한다. ○ 각주(註)는 해당 페이지 하단에 8포인트 표기하며, 본문과 구분토록 한다. ○ 보고서에 그림, 사진 등 삽입물이 있을 때에는 용역성과물 제출 시 해당 삽입물의 원본파일(jpg 등)을 제출하여야 한다. ○ 원칙적으로 한글을 사용(한문, 영문 혼용가능)하고 표, 그림 등의 제목 및 내용도 가급적 한글로 사용하며 필요한 경우 영문 등을 혼용한다. ○ 뒷면지에는 주의문을 넣는다. ○ 참고문헌(reference) 및 기존 수질측정자료 인용 등의 경우 본문 중에 출처를 반드시 표기하여야 하며 표기는 다음의 예에 준한다. 예1) 저자가 1명인 경우 : (Kim, 2019) 또는 (김, 2019) 예2) 저자가 2명인 경우 : (Kim & Lee, 2019) 또는 (김과 이, 2019) 예3) 저자가 3명 이상인 경우 : (Kim et al., 2019) 또는 (김 등, 2019) 예4) 문헌이 출판 중인 경우 : (Kim, in press) 또는 (김, 인쇄중) 예5) 논문으로 발표되지 않은 경우 : (Kim, pers. comm.), (Kim, pers. obs.) 예6) 동일 저자의 문헌을 2편 이상 연속 인용할 경우 : (Kim, 2018, 2019) 예7) 여러 개의 문헌이 동시에 인용될 경우 : (Kim, 2018; Lee et al., 2019) ○ 참고문헌 기재시, 인용문헌은 국문을 가나다 순으로우선 배열한다. 이어서 중문과 일본어로 표기된 문헌을 훈음에 따라 배열하고, 영어, 불어, 독어 등 라틴문자의 문헌을 알파펫 순으로 배열한다. 동일한 저자에 의해 출판된 문헌이 2편 이상인 경우 영어 알파벳 소문자를 년도 뒤에 붙여 구분한다. 또한, 같은 년도에 다른 저자에 의해 출판된 문헌이라도 본문에 인용시 표시 양식이 같은 경우 알파벳 소문자로 구분한다. 학술잡지는 저자명, 년도, 제목, 잡지명, 권, 페이지 순으로 개재한다. 단행본의 경우에는 저자명, 년도, 도서명(출판횟수), 출판사명, 출판도서명, 페이지 순으로 한다. 학위논문의 경우에는 저자명, 년도, 제목, 수여대학교, 수여도시명, 국가, 페이지 순으로 한다. 연구보고서의 경우에는 저자명, 년도, 제목, 발행기관, 페이지 순으로 한다.

< 뒷면지 >

20  년 금강수계 환경기초조사사업 보고서

□ 발주기관 : 금강수계관리위원회(대전광역시 유성구 대학로 417)

○ 총괄부서 : 유역계획과(042-865-0821)

○ 과제관리부서 : 해당부서(사무실 연락처)

○ 과제담당자 : 성명 직위(급)(사무실 연락처)

□ 수행기관 : 용역수행기관명(주소)

○ 연구책임자 : 성명 직위(급)(사무실 연락처)

○ 과제담당자 : 성명 직위(급)(사무실 연락처)

주        의

1. 본 보고서는 금강수계관리위원회에서 환경기초조사사업으로 수행한 연구보고서입니다.

2. 본 보고서 내용을 사용 및 발표할 때에는 반드시 금강수계관리위원회에서 시행한 환경기초조사사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개해서는 아니 됩니다.

< (참고) 사사문구(감사의 글) >

· 본 논문은 금강수계관리위원회 환경기초조사사업의 지원을 받아 수행되었습니다.

· This research was supported by a grant from Environmental Basic Research program funded by Committee for Management of Geum River Basin

보고서 초록

과 제 명	(국문)
	(영문)
수행기관	수행기관명(연구책임자 : 홍길동)
연구기간	20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.
연 구 비	000,000,000원
요 약	연구의 목적, 본론, 결론 순으로 서술 ※ 무엇을 문제로 삼고, 무엇을 소재로 했으며 어떠한 결론이 도출되었는지 기술
색 인 어	(국문) 6개 이상, 콤마(,)로 구분
	(영문) 6개 이상, 콤마(,)로 구분

< 별지 제7호 서식 >

연구사업비 사용실적 보고서

□ 과제 현황

과 제 명
수행기관*	수행기관명(연구책임자 : )
계약기간	20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.
계약금액	000,000,000원

* 공동연구일 경우에는 주관연구기관과 공동연구기관을 구분하여 작성

□ 참여연구원 현황

성명	직급	참여기간	변경사유(변경승인 문서번호)
홍길동	책임연구원	20 . 00. ~ 20 . 00. 00.
	연구원		퇴직(유역계획과-0000, ´00.00.00)
	연구보조원
	보조원

※ 공동연구일 경우에는 ‘소속’란을 추가하여 작성

□ 연구사업비 사용실적 현황

(단위 : 원)

구분	계약금액	변경금액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
합계
1. 인건비 - 책임연구원 - 연구원 - 연구보조원 - 보조원
2. 경비 - 여비 - 유인물비 - 전산처리비 - 재료비 - 회의비 - 임차료 - 교통통신비
3. 일반관리비
4. 이윤
5. 부가가치세
6. 위탁연구비

※ 공동연구일 경우에는 위와 동일한 양식으로 기관별로 작성

□ 비목·세목별 세부내역서

1. 인건비

연번	성명	직급	사용내역	지급금액(원)	지급일	증빙번호
인건비 합계
0월 인건비(홍길동 등 0명)
1	홍길동	책임연구원	0월 인건비	000,000,000	2019-06-25	인건비-01
2
3
0월 인건비(홍길동 등 0명)
4

2. 경 비

2.1. 여비(국내여비)

연번	출장일	출장지	출장목적	출장자	출장비(원)					출장비 지급일	증빙 번호
					계	일비	식비	숙박비	운임
합계										-	-
1	2019-05-08	옥천	시료채취	홍길동	192,018	20,000	20,000	50,000	100,000	2019-06-25	여비-01
2
3

2.2. 유인물비

연번	사용일	사용내역	사용처	사용금액(원)	지급일	증빙번호
합계				0		-
1	2019-05-08			000,000,000	2019-06-01	유인물비-01
2
3

2.3. 전산처리비

연번	사용일	사용내역	사용처	사용금액(원)	지급일	증빙번호
합계				0		-
1	2019-05-08			000,000,000	2019-06-01	전산처리비-01
2
3

2.4. 재료비

연번	사용일	사용내역	사용처	사용금액(원)	지급일	증빙번호
합계				0		-
1	2019-05-08			000,000,000	2019-06-01	재료비-01
2

2.5. 회의비

연번	사용일	사용내역	사용처	사용금액(원)	지급일	증빙번호
합계				0		-
1	2019-05-08			000,000,000	2019-06-01	회의비-01
2

2.6. 임차료

연번	사용일	사용내역	사용처	사용금액(원)	지급일	증빙번호
합계				0		-
1	2019-05-08			000,000,000	2019-06-01	임차료-01
2
3

2.7. 교통통신비

2.7.1 시내교통비

연번	출장일	출장지	출장목적	출장자	출장비	지급일	증빙번호
합계						-	-
1	2019-05-08	옥천	점검협의 참석	홍길동	000,000,000	2019-06-25	교통통신비-01
2
3

2.7.2 유편료 등

연번	사용일	사용내역	사용처	사용금액(원)	지급일	증빙번호
합계				0	-	-
4	2019-05-08			000,000,000	2019-06-01	교통통신비-04
5
6

3. 일반관리비(비영리기관에 한해 작성)

4. 이윤(영리기관에 한해 작성)

5. 부가가치세(과세기관에 한해 작성)

6. 위탁연구비* : 계약서 사본, 과업지시서 사본, 성과물 사본, 지급영수증 등

* 비·세목은 ‘학술연구용역원가계산서(기획재정부 계약예규)’를 준용하여 편성

붙임 : 비목·세목별 집행 증빙자료 1식

< 별지 제8호 서식 >

연구성과 활용보고서

과 제 명
연구기간	20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00.
수행기관	(연구책임자 : 홍길동)
연 구 비
연구목적 및 내용	○ (목적 및 배경) 대청호 및 그 상류 유역의 물환경 보전 및 개선을 위한 환경기초 자료 확보 ○ (연구내용 및 결과) 오염우심지역에 대한 수질·유량 모니터링, 오염원 현장조사 및 호내 생물상 조사를 통한 물환경 기초자료 D/B 구축 및 대청호 수질·수생태계 개선 방안 제시 ○ (활용방안) 정책반영, 업무개선 등 구체적인 활용계획 기술
성과활용 실적(계획안)	○ 활용실적 ※ 논문, 발표자료 등 구체적인 실적 제출 - (학술지 게재) 학술지 명칭, 연도, 호, 발행기관 - (학술발표) 학술회의 명칭, 연도, 호, 장소, 국명 - (정책활용) 법령 제·개정, 제도개선 및 정책반영 등 - (기타) 방송, 신문, 저널 등에 보도된 내용 ○ 활용계획(안) ※ 사전에 사사문구를 발주처와 협의 후 사용 - (20 . 01. 00.) 활용계획 분야 및 내용 기술 -

< 별지 제9호 서식 >

수행실적 보고서(00월)

□ 목적 및 배경

○

○

	< 사업 개요 >
· (계 약 명) · (계약기간) 20 . 00. 00. ~ 20 . 00. 00. / (계약금액) 000,000,000원 · (수행기관) / (연구책임자) · (주요내용) · (추진경위) 착수계(´00.00) → 착수보고회(´00.00) → 자문회의(´00.00)

□ 수행실적(00월)

○ 주요과업에 대한 수행실적 기술

- 세부내용【붙임 1】

○ 주요과업에 대한 수행실적 기술

- 세부내용【붙임 2】

□ 향후 연구계획

○ 주요과업에 대한 향후계획 기술

- 세부내용【붙임 3】

○ 주요과업에 대한 향후계획 기술

- 세부내용【붙임 4】

□ 현안 및 문제점, 대책(안)

□ 건의사항 등